배전공사 협력업체 업무처리기준

2001.   11

한국전력공사

1. 목 적

배전공사의 적기시공과 고장 발생시 신속한 복구체제를 확립하고 협력업   체의 책임의식을 고취함으로써 공사 시공품질 향상을 통한 배전설비의 건설   및 유지관리에 만전을 기하고자 한다.

2. 적용범위 및 대상공사

가. 적용범위

추정가격(부가가치세 제외)5,000만원 이하의 배전공사에 적용한다.

다만, 신규공사인 경우 인입선 및 저압선 일부의 시공은 필요에 따라         내선시공자가 시행할 수 있다.

나. 대상공사 구분

(1) 고압단가계약 공사 (고압협력업체 수행공사)

(가) 계약된 지역내에서 발생되는 배전설비 공사중 저압단가계약 공사

를 제외한 모든 공사

(나) 활선 또는 무정전공사의 시공은 정전 감소효과, 현장여건 등을 고             려하여 시공부서장이 결정한다.

(2) 저압단가계약 공사 (저압협력업체 수행공사)

380V동력승압공사, 전압단일화공사, 전력량계 교환공사, 전력량계 유          지보수공사, 저압삼상 해지시공, 인입선 정비공사(인입용 전주시공           포함) 및 필요에 따라 당사에서 지시하는 외선불요 인입선 소요분           신규공사

다만, 전주교체, 변압기교체 및 7,000V를 초과하는 설비의 공사가 수          반되는 경우는 제외한다.

다. 적용의 배제

(1) 공사의 시급성 또는 특수성으로 인하여 사업소장이 필요하다고 인정          하는 경우에는 배전공사 단가계약으로 발주하지 않을 수 있다.

(2) 배전공사의 부대공사로 전기공사업 이외의 공사업 면허를 필요로 하          는 공사는 별도의 계약으로 시행할 수 있다.

3. 추정도급예산액

가. 고압 단가계약공사

고압 단가계약공사의 추정도급예산액은 부가가치세를 포함하여

2,062백만원으로 한다.

나. 저압 단가계약공사

저압 단가계약공사의 추정도급예산액은 2002년도 사업소별 220V(380V)

승압 및 전력량계 교체공사 등에 대한 본사배정 추정예산액으로 한다.

다만, 본사배정 추정예산액이 부가가치세를 포함하여 15억원 이상되는        사업소는 배정 추정예산액의 2분지1에 해당하는 금액을 추정도급예산액       으로 한다.

4. 지역분할

가. 분할집행

(1) 지역분할은 지사직할, 지점단위로 해당사업소장이 분할 집행한다.

(2) 지역분할은 대상공사별 분할기준에 의하여 집행하고, 사업소 여건상          특별한 사유로 분할지역수의 조정이 필요한 경우에 한하여 1차사업          소의 심의를 거쳐 타당성을 검토하고 본사 승인을 득한후 분할지역          수를 조정할 수 있다.

(3) (2)항의 특별한 사유라 함은 다음과 같다.

추정 총도급예산액을 산정하는 '99년도 및 '00년도의 단가계약공사           실적이 수해복구, 대단위 택지개발, 심야수용 등으로 과거 연평균 공사          실적보다 과다하게 반영되어 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보          다 현저하게 감소될 것으로 예상되거나 또는 향후 전망되는 분할지          역 단위의 추정도급액이 기준치보다 현저하게 증가할 것으로 예상되          는 경우

나. 대상공사별 분할기준

(1) 고압 단가계약

사업소 단위 추정 총도급예산액을 기준으로 아래와 같이 지역을 분할한다.

(가) 분할지역수 산정

분할지역수 = 추정총도급예산액 ÷ 2,062백만원

(나) 추정 총도급예산액 = (A + B) ÷ 2

○ A = 입찰시행 2년전(‘99) 사선,활선,무정전 단가공사 도급비 실적

○ B = 입찰시행 1년전(‘00) 사선,활선,무정전 단가공사 도급비 실적

※ 분할지역수는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리에서 4사5입

(다) 입찰지역수 결정

○ 분할지역수 산정 결과에 따라 입찰지역수를 결정한다.

○ 분할지역수가 1미만인 사업소는 분할지역수를 1로 한다.

(2) 저압 단가계약

저압 단가계약 입찰지역수는 각 사업소당 1개지역을 원칙으로 한다.

다만, 본사 추정배정예산액을 기준으로 단위 사업소당 15억원 이상인

경우에는 2개지역으로 분할하여 입찰지역수를 결정한다.

다. 분할방법

(1) 고압단가 지역분할은 사업소내 행정구역 단위로 분할하되 과거 공사

실적 등을 참조하여  가급적 분할지역간 공사수주액이 균등한 규모로          분할되도록 감안한다.

(2) 저압단가는 단위 사업소 전구역을 담당하도록 하되 2개지역으로 분할

하는 해당 사업소는 고압단가 지역분할 방법과 동일한 방법으로 한           다.

5. 업체선정

가. 업체수

대상공사별로 1개 분할지역 단위에 1개 업체를 선정한다.

나. 입찰참가자격

입찰참가 등록마감일 현재 해당사업소(지사직할,지점) 관할 구역내에         주된 영업소를 두고 있는 전기공사업체

다. 중복낙찰 제한

(1) 낙찰예정자 결정순서는 “마”항의 입찰집행 순으로 하며, Ⅳ급지점 대          상 공사별 입찰장소 상이에 따라 Ⅳ급지점의 저압단가 입찰이 먼저           시행될지라도 낙찰예정자 결정은 1차사업소 고압단가지역부터 순차적

으로 결정한 후 Ⅳ급지점의 저압단가지역 순으로 결정한다.

(2) 고․저압 단가계약의 구분없이 적격심사 결과 1개 지역에 낙찰예정자

로 선정된 업체는 다른지역의 고압 또는 저압단가계약 낙찰예정자로

선정될 수 없다.

라. 입찰시기

배전공사 단가계약 입찰은 2001년 12월 4일 전국적으로 동시에 시행함        을 원칙으로 한다.

단, 사업소 형편상 부득이 해당일자에 시행이 곤란할 경우는 입찰일          익일(‘01.12.5)까지 시행할 수 있다.

마. 입찰 시행방법

(1) 계약상대자 선정을 위한 입찰은 “4”항 가. 지역분할 집행사업소 (단,

Ⅳ급지점의 고압단가계약은 1차사업소)에서 시행한다.

(2) 단가계약 입찰은 고압단가지역에서 저압단가지역 순으로 입찰에 부쳐

낙찰예정자를 결정한다.

【예 시】

1차 : 고압 A지역 입찰 - 적격심사 1순위자 선정 - 낙찰예정자 결정

2차 : 고압 B지역 입찰 - 적격심사 1순위자 선정 - 낙찰예정자 결정

3차 : 저압 A지역 입찰 - 적격심사 1순위자 선정 - 낙찰예정자 결정

바. 입찰 보증금

입찰보증금은 추정계약금액의 100분의 5 이상을 현금 또는 국가를당    사자로하는계약에관한법률시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제37조제    2항의 보증서 등으로 납부하여야 한다

사. 낙찰자예정자 결정

(1) 공종별 공사비단가 및 설계기준에 의거 추정가격 5,000만원(부가가치

세 제외)이하 공사의 가상설계서를 지역별로 작성하여 계약부서로 송   부하면 계약부서는 공사원가 예정가격 산출기초조서, 예비가격기초금액,  15개의 복수예비가격표를 작성한 후 입찰을 집행한다.

(2) 낙찰예정자 결정방법은 배전공사 단가계약 적격심사기준에 의한다.

(3) 적격심사 1순위자가 최초 제출하는 적격심사 서류는 입찰참가지역에          관계없이 해당지점 전 입찰에 동일하게 적용․평가한다.

단, Ⅳ급지점의 대상공사별 적격심사 서류는 입찰집행장소별로 각각

접수한다.

(4) 재공고 입찰을 실시한 결과 경쟁입찰이 성립되지 아니할 때에는 수의

계약으로 계약상대자를 선정할 수 있다.

아. 낙찰자예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 계약체결시까지 다음에서 정하는 배전전공       과 장비 및 야적장을 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하       여야 한다.

(1) 상근 배전전공 확보기준

(가) 고압 협력업체

정부, 당사 또는 당사에서 인정하는 교육기관에서 소정의 활선공법            교육을 이수한 배전활선전공 5명이상의 편조승인된 인원과 당사             또는 당사에서 인정하는 교육기관에서 기능평가 자격을 취득한 배            전전공 10명이상을 확보하여야 한다.

(나) 저압 협력업체

각 사업소 또는 분할지역별 추정도급예산액 규모에 따라 다음과             같이 일반배전전공(배전활선전공 또는 기능평가 자격을 취득한 배            전전공도 인정가능)수를 확보하여야 한다.

○ 추정도급액 4억미만            :   4명이상

○ 추정도급액 4억이상 8억미만    :   6명이상

○ 추정도급액 8억이상 12억미만   :   8명이상

○ 추정도급액 12억이상           :  10명이상

(2) 장비 확보기준

(가) 고압 협력업체 낙찰예정자로 선정된 업체는 계약체결일까지 [별표1]

에서 정한 고압협력업체 필수장비를 확보하고, 무정전 공사를 수행

할 수 있도록 관할 1차사업소 주관으로 시행하는 무정전공사 현장

적용평가를 받아야 한다.

단, 무정전공사 현장적용평가를 필한 업체는 현장적용평가를 생략             한다.

(나) 저압 협력업체 낙찰예정자로 선정된 업체는 계약체결일까지 [별표2]

에서 정한 저압협력업체 필수장비를 확보하여야 한다.

(다) 위 “(가)"항 및 ”(나)“항의 장비가 공사 수행중 손망실 등으로 활

용이  곤란한 경우는 즉시 교체, 수리, 보충하여 공사수행에 차질이

없도록 하여야 한다.

(3) 야적장 확보기준

고압협력업체는 300㎡이상의 야적장을 확보(임대, 업체간 공동사용 조        건도 가능)하여야 하며 공동사용의 경우 각각 300㎡이상을 확보하여야        한다.

자. 인원 등 확인방법

낙찰예정자가 결정된 경우 계약담당부서는 낙찰예정자를 공사 발주부서       로 통보하고 공사발주부서는 통보받은 업체의 인원 등의 보유여부를         “아”항의 기준에 따라 다음과 같이 확인한 후 그 결과를 계약담당부서       로 통보한다.

(1) 상근 배전전공

상근 배전전공은 낙찰예정업체의 입사확인서(국민연금관리공단에서          발행하는 국민연금 가입확인서 또는 의료보험 피보험자 자격 확인서           첨부)에 의하여 확인된 인원으로 한다.

(2) 장 비

○ 각 품목별 기능, 동작상태, 수량 등 현장실사를 통해 확인하여야 하며           사진 등으로 증빙자료를 확보한다.

○ 보유장비중 임대한 장비는 공증을 받은 임대차 계약서에 의해 확인           한다.

○ 보유장비중 신규품목에 대한 유예기간을 부여한 경우 해당 유예기간

만료이전에 확보여부를 재 확인한다.

(3) 야 적 장

토지대장, 등기부등본에 의한 소유여부를 확인하거나 공증을 받은 임         대차(임대차 기간은 계약이행기간 이상) 또는 공동사용 계약서에 의해         확인한다.

차. 계약체결

(1) 계약담당부서는 기준에서 정한 인원 등을 확보한 낙찰예정업체를 낙          찰자로 확정하여 계약을 체결한다.  인원, 장비(고압 협력업체의 경우          에는 무정전 현장적용평가를 포함한다.), 야적장 확보여부 확인결과           기준에 미달하는 경우에는 계약을 체결할 수 없다.

(2) 고압 및 저압 협력업체 낙찰예정자로 선정된 업체는 입찰일로부터 1          개월 이내에 계약을 체결하여야 한다.

다만, 사업소장은 1회에 한하여 일정기간(저압협력업체는 1개월이            내, 고압협력업체는 2개월이내)의 유예기간을 정하여 기준에 의한 인          원, 장비 및 야적장을 확보토록 할 수 있다.

(3) 입찰결과 적격심사에 따른 낙찰예정자 결정이 지연되거나, 업체 사정          으로 인하여 계약체결이 지연되어 유예기간을 부여하는 경우 해당           기간동안에 발생되는 공사는 기 계약된 고압단가계약 업체와 연장계          약하여 시공토록 하고,  이때 연장계약기간 동안의 공사구역 조정이          필요할 경우에는 해당 사업소장이 결정하여 운영할 수 있다.

(4) 유예기간이 경과하고도 인원, 장비, 야적장을 확보하지 못한 경우 당          해지역은 새로운 입찰을 실시한다.

카. 계약 보증금

(1) 보증금산출(추정계약금액 × 10% )

입 찰 금 액

․추정계약금액 = 추정도급예산액 × ─────────

가상설계사정금액

․연대보증인이 없는 경우 추정계약금액 × 20%

(2) 납부시기 및 방법

계약체결전까지 현금 또는 시행령 제37조 제2항의 보증서등으로 납부한다.  다만, 계약기간내 추정계약금액이 증액된 경우 당초 납부한 계약보증금만으로도 계약이행에 지장이 없다고 판단될 경우 증액된 금액에 해당하는 계약보증금을 추가로 납부하지 아니하게 할 수 있다.

타. 계약기간

(1) 고압 및 저압 협력업체의 계약기간은 1년을 원칙으로 하며 그 이행기

간은 1월1일부터 12월31일까지로 한다.

(2) 다만 계약기간중 영업정지 또는 부정당업자로 제재받은 사실이 없고          계약기간중 계약이행실태를 [별표5] 및 [별표6]의 기준에 따라 협력업          체 종합평가 결과 900점 이상 득점한 우수업체에 대하여는 업체가 동          의하는 경우 1년간 1회에 한하여 연장계약을 체결할 수 있다.

이 경우 평가기간은 계약 체결일로부터 12월 15일까지 함을 원칙으로          한다.

(3) 제"(2)"항에도 불구하고 우리회사의 특별한 사유로 인하여  연장이          불필요하다고 판단될 경우에는 연장계약을 체결하지 아니할 수 있으며,          정부에서 시행하는 전력산업 구조개편 계획에 따라 배전회사가 분          할되어 각 배전회사에서 별도의 시공체제 기준을 정하여 운영코자           할 경우에도 연장없이 각 배전회사의 기준에 따른다.

(4) 계약기간중 계약이행을 할 수 없는 업체가 발생하여 계약을 해제 또          는 해지하는 경우 당해지역에 대한 재 계약업체와의 계약기간은 당해          계약서의 잔여계약기간으로 하며, 이 경우 연장계약은 할 수 없다.

6. 계약금액 산출 및 시공통보

가. 단위공사 계약금액 산출

(1) 공종별공사비단가에 의거 산출한 단위공사 설계명세서를 기초로 계약          부서에서는 사정금액을 결정하며, 단위공사의 계약금액은 사정금액에          공량단가율을 곱한 금액으로 한다. 다만, 공량단가율은 낙찰금액을 사          정금액으로 나누어 계산하며, 소수점 2자리 미만은 절사한다.

(2) 2002년도 공종별 공사비 단가는 2001년도 공종별 공사비단가에 물가          변동율을 반영하여 산정한 금액으로 한다.

(3) 산업재해보상보험법에 의거  산재보험을 일괄 가입한 경우 또는 고용보험법에 의거 고용보험을 일괄 가입한 경우에만 산재보험료 및 고용보험료를 경비비목으로 계상  할 수 있다.

나. 준공 정산금액 산출

설계변경, 물가변동 및 기타내용 변경으로 인한 계약금액 조정이외에는        당초 계약금액을 준공정산 금액으로 하여야 한다.

다. 시공 통보

(1) 계약담당부서는 단가계약에 따라 발주되는 공사에 대한 일건서류를           공사발주부서로부터 접수하면 당일에 시공통보서를 3부 작성하여 그          중 1부는 계약부서에 보관하고 시공부서와 계약상대자에게 각1부를          송부하며, 고압단가계약에서 무정전(활선포함)공사의 경우에는 시공부          서에서 계약상대자에게 안전보건관리규정 제20조 및 무정전배전공사           시공업체 관리기준 [별표 #7]에 규정된 무정전(활선) 작업통보서를 발행          하여야 한다.

(2) 설비고장이나 긴급안전조치 등 긴급한 공사의 경우 설비운영부서장           (또는 비상근무내칙에서 정한자)은 공사관리규정 제76조에 의거 선착         공지시를 할 수 있다. 이 경우 기준 2. 다. (1)항에 의거 최단시간내에         복구가 가능한 업체나 2개 이상의 업체에게 선착공지시를 할 수 있으         며 설비운영부서장은 복구공사 완료후 즉시 설계명세서를 작성하여          계약부서로 계약을 의뢰하여야 한다.

(3) 배전설비 운영상 협력업체 직원의 대기가 필요한 경우 배전설비 운영         부서장의 요청에 따라 협력업체는 소속직원을 대기하도록 하여야 한          다.

7. 시공관리

가. 책임시공

모든 공사는 협력업체가 적정인력과 장비를 활용하여 책임 시공함을 원        칙으로 한다. 다만, 활선작업, 매설물 설치 등 기술적인 지원이나 현장        확인이 필요한 다음과 같은 공정의 경우에는 감독자 등 관계직원의 입        회하에 시공토록 한다.

(1) 활선작업중 개폐기 신설 및 교체, 할입주신설, 전주교체

(2) 3Ø고압이상 선로의 중요 휴전작업

(3) 매설물, 은폐장소 또는 접근확인이 곤란한 장소 등 준공후 확인이            불가능한 작업

(4) 기타 중요한 공정으로 현장입회가 명시된 경우

(5)  상기 공종중 공사감독자의 현장입회가 불가능한 경우에는 각 공정별            시공상태를 확인할 수 있는 사진등 자료를 제출하게 할 수 있다.

나. 작업종사자의 자격

계약상대자는 당사에서 실시한 협력업체 종사자 교육 등 실무교육을 필       한 자로 하여금 공사를 시공, 관리하도록 하여야 하며, 교육 미이수자를       활용하고자 할 때에는 공사 시행전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

다만, 활선작업 및 무정전공사는 배전활선전공 자격증 소지자로서 활선작       업조에 편성된 자가 기준인원 이상 참여하여야 하며, 지중선케이블 접속       공사시에는 지중케이블 접속교육을 이수하고 자격을 취득한 배전지중전       공 2명 이상이 참여 하여야 한다.

8. 안전 및 품질관리

가. 계약상대자는 공사현장의 안전관리에 대한 모든 책임을 지며, 안전보건         관리규정 제23조 제2항의 안전관리계획서를 시공부서에 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 매분기별로 안전관리비 집행내역서를 시공부서에 제출하        고 시공부서는 사용내역을 확인한 후 목적외 사용 및 미사용 금액을         회수하여야 한다.

나. 계약상대자는 안전사고 예방을 위하여 작업현장 안전관리에 철저를           기하고, 소속직원이 안전작업수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적으로        교육을 시행하여야 한다.

라. 계약상대자는 시공품질에 대한 책임을 다하며 계약자 품질보증계획           서를 작성하여 품질담당부서에 제출하여야 한다.

9. 준공검사

가. 계약상대자는 단위공사 준공시 공사준공신고서를 시공부서에 제출하여        야 한다.

나. 준공신고서에는 준공물자기별조서, 준공도면, 공사비 변경명세서와 필요        시 매설물․은폐물 시공과정 및 시공완료 상태 등의 사진을 첨부하여         야 한다.

10. 하자보수 보증금 수남

가. 하자보수보증금 산출

단위공사 준공정산금액의  2%

나. 하자담보책임기간

단위공사 준공인수일로 부터  2년

다. 납부시기 및 방법

매단위 공사별 최종 대가지급시까지 납부하도록 하되 납부방법은 현금 또는 시행령 제37조 제2항의 보증서 등으로 납부하여야 한다.

다만, 계약체결시 추정계약금액에 대한 일괄 하자보수보증서를 제출한 업체는 매단위 공사별 하자보수보증금의 납부를 면제한다.

11. 사후관리

가. 계약기간중 회계규칙에 규정된 사항외에 다음에 따라 계약상대자를

제재 한다.

(1) 제재항목별 기준

.

제재내용 항 목	계약기간중 시공통보서 발행중지		중도해지
	1개월	3개월
1. 시공통보 이행불응 또는 무단작업	5 회	10 회	15 회
2. 공사의 하자 또는 작업자 과실로 인한 고압선로 고장 발생	5 회	10 회	15 회
3. 안전사고 발생	150점이상	300점이상	400점이상
4. 불량공사재료 사용으로 고압선로 고장 유발	2 회	5 회	10 회
5. 연체발생	10회이상	20회이상	30회이상
6. 안전지적서 또는 시정통보서 발행	10회이상	20회이상	30회이상
7. 휴전시간 30분이상 지연	5 회	10 회	15 회
8. 공사건별 공사시공품질 평가결과 분기별 누계 평균점수	70점이상 ～ 80점미만	60점이상 ～ 70점미만	60점미만
9. 공사의 하자 또는 작업자 과실로 인한 부실공사로 대외 민원 이 발생된 경우	2 회	5 회	10 회

주1) 제재항목별 제재기준은 연간 누계치 기준임

주2) 안전사고 발생시 제재기준은 안전담당부서의 사고조사에 대하여

특수계약심의위원회가 심의한 결과 업체의 귀책사고로 판단하는

경우 적용하며, 제재점수는 아래와 같이 산정한 년간 누계치를

적용한다.

ㅇ 감전사고 : 사망(1회당 50점)  ㅇ 비감전사고 : 사망(1회당 30점)

중상(1회당 30점)                 중상(1회당 20점)

경상(1회당 15점)                  경상(1회당 10점)

(2) ‘(1)’항 사항이 발생시 시공부서는 이 사실을 계약담당부서에 7일이내          통보하여야 하며 계약담당부서는 필요한 조치를 취하고 관리대장에           기록하여 관리한다.

다만, 공사건별 공사 시공품질평가서는 공사시행 부서별로 분기실적          을 집계하여 매 분기 종료 15일 전까지 계약담당부서에 통보한다.

(3) 시공통보가 중지된 업체의 지역에 대하여는 연대보증업체로 하여           금 시공하도록 하여야 하며 연대보증업체의 시공이 불가능한 경우          관내업체에 수의계약으로 시공할 수 있다.

나. 공사 불량재료 사용 또는 부실시공으로 인한 선로고장 유발업체는           ‘가’와 병행하여 다음과 같이 사고배상금을 납부하도록 한다.

(1) 대  상

하자담보 기간내의 공사로서 다음의 부실시공으로 인하여 일시고장          을 유발한 업체 또는 공사시공중(공사중지 포함)업체과실로 인하여          일시고장을 유발한 업체

(가) 전주근입 미달시공 (근가 미취부 포함)

(나) 전선접속 (압축포함) 시공불량

(다) 바인드 시공불량

(라) 전선이도 불량

(마) 각종 볼트류 시공불량

(바) 시공중 업체과실로 인한 정전사고 발생(고압사고만 적용)

(사) 기타 공법 미준수

(2) 선로고장 발생회수별 사고배상금 부과기준

구 분	배 상 금	비 고
고압선로 고장발생	500만원	1회당
저압선로 고장발생	100만원	1회당

다만, 고장의 경중에 따라 필요한 경우에는  사고배상금 부과와

병행하여 계약에 관련된 제재조치(중도해지, 부정당업체 제재)를

한다.

(3) 사고배상금 적용방법 및 부정당업자 제재조치

(가) 항목이 동시에 2건이상 발생된 경우 고액항목 1개만 적용한다.

(나)  설비피해에 대한 손해금액은 별도로 납부하도록 하여야 한다.

(4) 조치 방법

(가) 사고배상금 부과사항 발생시 설비운영부장 (시공중 발생 사항은

시공부서장)은 7일이내에 발생 내용을 공사계약부서로 통보한다.

(나) 계약부서는 발생 빈도별 제재기준에 의거 다음과 같이 사고 배상              금의 수납을 위한 조치를 취하고 관리대장에 기록 관리한다.

․ 해당 공사대금 지불시 공제

․ 사고배상금을 부과하여야 할 사고가 공사비 지불후 발생된 경우              에는 발생월에 지불되는 공사비에서 공제

․ 공사비 지불건이 없는 경우에는 해당업체로 하여금 입금하도록              조치

․ 타 사업소관내 업체는 관할사업소에서 공제 및 납부

․ 회계처리는 지체상금과 동일한 방법으로 처리

다. 협력업체 소속 기능인력 개별관리

(1) 공사 시공품질 확보와 안전사고 예방을 위하여 협력업체 소속 배전전         공 및 배전활선전공이 작업시행중 부실시공이나 안전사고 등을 유발         할 시에는 개인별 벌점을 부과하여 일정기간 공사참여를 제한하거나         기능자격을 취소한다.

(2) “(1)”항에 대한 세부사항은 ‘무정전배전공사 시공업체 관리기준’ 제38          조(기능인력 개별관리)의 관련조항에 따른다.

라. 협력업체 관리

불법 하도급공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 협력업체의

하도급여부, 기능인력, 장비보유현황을 아래와 같이 확인한다.

(1) 확인책임자 : 기획관리실장 또는 기획관리담당 부서장

(2) 평가  반원 : 확인책임자가 지정한 자(2～3명)

(3) 실사  회수 : 반기 1회 (필요시 수시 시행)

(4) 점검  내용 : 협력업체 하도급여부, 기능인력, 장비보유현황 점검

(5) 사후  조치

○ 불법 하도급으로 판명될시 별도로 체결한 ‘배전공사 부조리 및 불             법하도급방지 협약서’에 의거 조치

○ 기능인력 및 장비 보유현황이 기준에 미달될 시에는 즉시 해당업             체에 통보하고, 기준에 적합할 때까지 시공지시 보류 조치

12. 협력업체종사자 교육실시 및 기능경기대회 개최

가. 이 기준에 의하여 계약체결된 협력업체의 종사자는 년1회 당사에서

실시하는 다음 교육에 참여하도록 한다.

(1) 교육대상 : 현장대리인 및 전공

(2) 교육시기 : 1/4분기내

(3) 교육주관 : 2차사업소 단위

(3) 교육내용

․ 관내 배전계통 및 선로현황,  고객응대 및 서비스 향상에 관한 사항

․ 안전작업수칙 준수 및 배전공사 시공품질 확보에 관한 사항

나. 협력업체는 상기 ‘가’항에 의한 교육이외에 당사 중앙교육원에서 시        행하는 직원 업무능력 향상교육에 참여할 수 있으며, 세부 시행방법        은 중앙교육원의 교육계획에 따른다.

(1) 교육대상 : 현장대리인 또는 전공장 (필요시 전공도 가능)

(2) 교육시기 : 계약기간중

(3) 교육주관 : 당사 중앙교육원

(4) 교육내용 : 신기술․신공법,  안전사고 예방 및 공사 시공품질에 관                       한 사항

다. 협력업체 기능인의 시공기술 향상과 업체평가를 위하여 연1회이상         기능 경기대회를 실시할 수 있으며,  대회 시행시는 2 주일전에 기        능평가 종목, 평가기준 및 평가방법등 세부내용을 공시한다.

13. 무정전 심의위원회 구성 운영

가. 고압 협력업체의 무정전공법에 대한 현장적용 확산과 원활한 운영을        위해 아래와 같이 무정전 심의위원회 (이하 `위원회'라 한다)를 구        성 운영한다.

나. 심의위원회의 구성

(1) 설 치 : 1차사업소

(2) 구 성

ㅇ 위원장 : 1차사업소 배전운영 담당부장

ㅇ 위  원 : 1차 사업소 및 평가대상 업체 관할 사업소의  4직급 기술                      계 간부중 위원장이 임명한 3～4명

ㅇ 간  사 : 1차사업소 협력업체 관리 담당과장

(3) 임 무

ㅇ 무정전 배전공사 적격업체 심사 및 현장적용 실증평가

ㅇ 무정전공법 현장적용 및 시공기술 향상과 관련한 제반업무의 심의             결정

14. 기  타

가. 이 기준에  명기하지 않은 사항은  정부투자기관 회계규칙, 정부투자        기관회계기준, 회계규준시행세칙, 계약업무처리요령, 당사 공사관리        규정 및 무정전배전공사 시공업체 관리기준 등에 따른다.

나. 이 기준에 의거 계약체결된 협력업체로서 계약 기간중 계약이행실태        를 [별표5] 및 [별표6]의 기준에 따라 종합 평가한 결과 900점 이상        득점한 우수업체에 대하여는 업체가 동의하는 경우 1년간 1회에 한        하여 연장계약을 체결할 수 있다.

다만, 우리회사의 특별한 사유로 인하여  연장이 불요하다고 판단될

경우에는 연장계약을 체결하지 아니할 수 있으며,

정부에서 시행하는 전력산업 구조개편 계획에 따라 배전회사가 분

할되어 각 배전회사에서 별도의 시공체제 기준을 정하여 운영코자

할 경우에도 연장없이 각 배전회사의 기준에 따른다.

다. 배전공사와 관련한 업무 투명성 확보와 불법하도급 방지를 통한 공         정한 계약질서 확립을 위하여 발주자와 계약상대자간에 “배전공사         부조리 및 불법하도급 방지 협약”을 체결,운영한다.

부     칙

이 기준은 ’01년  12월   일부터 시행한다.

[별표 1]

고압협력업체 필수장비(공구) 확보기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 일반 장비

품 명	단위	규격 및 용도	기준수량
접지저항 측정기	대	훅크온식, 보조전극식 1대 포함	4
훅크온메타	대	전압, 전류 겸용	3
블록(연선로라)	개	ACSR용	30
절연저항 측정기	대	1,000V, 2,000㏁	2
		500V, 1,000㏁	2
로타리해머 (진동전기압축방식)	조	-	1
절단기	대	600㎜이상	3
시메라(장선기)	개	캄아롱부 1.0Ton이상	5
멀티테스터	대	-	2
COS조작봉	개	23kV용	3
접지용구	조	특고압용 (22㎟이상)	6
절연안전모	개		20
안전허리띠	조	로프부	15
다기능전압기록계	대	24시간연속 전압측정용	2

품 명	단위	규격 및 용도	기준수량
검전기	개	80V ～ 7kV	6
		3.3kV ～ 35kV(낚시대형)	3
방전고무장갑	족	600V급	5
보호용가죽장갑	족	고압용	6
투광기	대	차량용 포함 (24W이상)	3
활 차	조	1.5Ton 이상	2
유압식압축기 (수동)	대	Y-35 (14～325㎟, 6각다이스)	3
전동식압축기 (전동 또는 엔진식) 활선작업차 장착용 인정	대	Y-46 (14～325㎟, 6각다이스)	2
전선압축기의 압축력시험기	대	Y-35, Y-46겸용 압축기의 적정 압축력 확인	1
전선피박기	개	58,95,160㎟용 각 3셋트 (또는32-160㎟용)	9
활선접근경보기	개	고압, 특고압 겸용	15
알미늄 브러쉬	개	-	10
유압식 절단기	대	ACSR, CU32-160㎟용	2
휴즈압착기	대	2.6mm～3.2mm (저압2.6㎜～22㎟)	5
공사용 차량	대	3.5톤이상 트럭 (카고크레인 장착)	1
		오가크레인 또는 백호(포크레인)	1

주) 오가크레인 또는 백호는 임대사용 가능 (단, 비협력업체 장비로써 1개업체

에만 임대 가능하며, 계약기간 동안 임대하여야 함)

2. 안전 장구

번호	품 명	규 격	기준수량	비 고
1-1	전선 카바	25kV, 5'	18
1-2	애자 카바	25kV, 9" HEIGHT	12
1-3	완금 카바	46kV	4
1-4	COS 카바	15kV	6
1-5	데드엔드 카바	25kV	12
1-6	전주 카바	72"	3
1-7	라인 호스	1" 23kV급	9
1-8	고무 브랑켓트	30kV급, 6“×36”	12
1-9	방전고무장갑	30kV급	6
1-10	고무소매	30kV급	6	절연조끼(30kV급)로 대체가능
1-11	애자후드	25kV이상	2

3. 활선스틱

번호	품 명	규 격	기준수량	비 고
2-1	와이어통	1 1/2“ 8‘	2	활선작업차붐(Boom)장착용 가완목이 있을때는 생략 가능
2-2	와이어통	2“, 10‘ 이상	1
2-3	새들엔드타이트너	2“	2
2-4	유니버셜폴(스틱)	8‘	1	로터리스틱으로 대체 가능
2-16	그립프올크램프스틱	1 1/4", 8'	1
2-17	와이어홀딩스틱		1	활선바이스크립 대체가능

4. 활선 공구

번호	품 명		규 격	기준수량	비 고
3-1	활선압축기		HY-35 (유압식)	1
3-2	전선카터		라쳇트형	2
3-3	활선피박기		58～160㎟(Set)	1
3-4	활선작업용 COS		25kV(점퍼케이블 크램프 포함)	3
3-5	핸드라인 훜		1/2 LB	1
3-6	1륜활차(절연)		1/2“×120‘	1
3-7	2륜활차(절연)		1/2“×120‘	1
3-8	로프포박 브라켓		7 1/2	1
3-9	클램프핀	직 구		12
3-10		곡 구		12
3-11	활선용 장선기 (장선기링크스틱 포함)		23 kV급 1,000kg.f (벨트식)	4	핫스틱텐션풀러로 대체 가능
3-12	바이패스 점퍼스틱		23kV급, 400A	3
3-13	바이패스 점퍼지지대		23kV급(임시걸이 3개 포함)	6
3-14	가완목		9 ft (홀다 3, 스트랍 2, T클램프 1, 애자 3개 포함)	1	붐장착용 가완목으로 대체가능
3-15	충전부 임시절연캡		잠바선, 변압기 인하 선 절단시 충전부 절연용	15개
3-16	가공지선 홀딩스틱		가공지선 활선설치장구 (FRP소재, 굴절식)	4개	가공지선 활선 설치공법 적용
3-17	텐셔너 (접지롤러 포함)		가공지선 가선중 장력 조절 기능 제동장치 보유	1대	“

주) 신규품목(가공지선홀딩스틱, 텐셔너) 확보는 ‘02.3.31까지 유예기간 부여 가능

주)  3-17 텐셔너는 2개업체간 공동사용 가능

5. 활선 작업차

번 호	품 명	규 격	기준수량	비 고
4-1	활선작업차	작업높이 15M 이상	1	절연바켓트럭, Aerial Lift와 동일품목

주) 활선작업차는 임대사용 가능(단,비협력업체 장비로써 1개업체에만 임대           가능하며 계약기간 동안 임대하여야 함)

권고 장비

번호	품 명			단위	권고수량	비 고
1	와이어통		스 틱	조	1	활선 간접작업시 활용
			싱글레버리프트, 쌔들익스텐, 와이어통밴드 등 부속공구
2	주상작업 발판대			개	1	″
3	윈치작기			대	1	필수품목에서 전환
4	불량애자 검출기			대	1	불량애자 검출작업시 활용
5	활선애자 청소기	본 체		조	1	활선 애자청소 작업시 활용 주수간 및 호스는 접지선이 내장된것
		수저항측정기
		절연 측정기
6	활선작업용 텐션 미터			개	1
7	활선스틱 공구 (링크스틱헤드, 바인드스틱 헤드 애자포크, 코터기제거기 볼소켓 조절기, 핀홀더 코터기 취부기, 조정핀, 함마 코터기 풀러, COS용 플라이어, 롤러링크스틱, 와이어통 새들엔드타이트너, 활선바이스 크립, 폴탑카바), 인성쇄클, 캄아롱,			개	각 1
8	유압식 압축기 (100 Ton)			대	1	장경간 압축인류크램프 접속시 필요
9	저압발전기차 - 380-220V, 100kVA이상 - 결상 등 검상장치부 - 주(보조)전원 케이블100㎟ 이상			대	1
10	절연안전모 부착형 무전기			대	4	작업중 무선연락 가능
11	휴대용 변압기테스터기			대	1	변압기 내부점검 필요
12	절연장화			족	4	바켓트럭내 2중절연 목적
13	저압수용가 탐사장치			대	1	지중선용 신개발품목
14	지중저압계통 탐지기			대	1	“
15	콘크리트 커터			대	1	“

6. 무정전 장비

순번	품 명	규격 및 용도	기준수량
1	바이패스케이블	22.9kV-y3상4선식 배전선로에서 300m이상 바이패스 가능	1Set이상
	1.1 단말케이블 1.2 중간케이블 1.3 분기케이블 1.4 개폐기접속 케이블 1.5 지상기기 연결 용 엘보케이블 1.6 직선접속재 1.7 분기 접속재 1.8 가지지크리트 1.9 공사용개폐기 1.10 케이블인류 크램프 1.11전주체부밴드 1.12 직선접속재 보호상자 1.13 분기접속재 보호상자 1.14 부품수납 상자 1.15 여유장처리 금구 1.16 케이블 프로텍터	38㎟ 15m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 50m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 15m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 50m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 15m이상 (상구분 색별 띠표시) 중간케이블 접속용 분기케이블 접속용(T분기) 케이블입상 지지용 바이패스 선로 개폐용 (검상기능부) 바이패스케이블 지지용 바이패스케이블 지지용 직선접속재 보호용(3상용) 분기접속재 보호용(3상용) 접속재 및 접속부품 수납용 케이블 여유장 처리용 케이블지상포설시 압축, 충격보호용	2조(3상기준) 4조(3상기준) 2조(3상기준) 2조(3상기준) 2조(3상기준) 15개 6개 4개 3대 30개 10개 6개 3개 2개 3개 8개

주) 1.5 지상기기연결용 엘보케이블은 지상기기(변압기+개폐기) 50대이상 보유

구역 단가업체에 한함

순번	품 명	규격 및 용도	기준수량
2	바이패스 케이블차 또는 장치	22.9kV-y 3상4선식 배전선로 바이패스케이블 운반,포설용 - 원격(배전반) 조작가능 - 케이블 얽힘 방지장치 부 - 3상동시 케이블감기, 풀기 능	1대 이상
3	이동용 변압기차 또는 장치	단상 100kVA 3대동시 교체 가능 - 22.9kV-y / 380-220V - 결상 등 검상장치 부 - 1차접속용 바이패스 케이블 ․22㎟ 15m이상 1조(3선)이상 - 접지용저압케이블 22㎟ 15m이상 - 1,2차 개폐기부(배전반 조작가능) - 저압접속용 케이블(중선선포함) 2중절연 100㎟이상, 20m이상 1조(4선)	1대 이상
4	특고압용 검상기	바이패스케이블 및 2단장주에서 상하단 검상용	1대
5	특고압 전류계	22.9kV-y 배전선로 부하 측정용	1대
6	저압용 검상기	저압케이블 검상용	1대

주) 바이패스케이블차, 이동용 변압기차는 임대사용 가능

(단, 비 협력업체 장비로써 1개 업체에만 임대 가능하며 계약기간 동안 임대

하여야 함)

7. 지중공사용 장비

품 명	단위	규격 및 용도	보유 기준		비 고
			A	B
양수기	대	엔진식 5HP	1	-
연선로라	대	케이블 포설용	10	-	가공용과 별도
윈치	대	7.5T	1	-	케이블 인입용
케이블절단기	대	600㎜이상(전동식)	1	-	원방 조작식
관로 도통시험기	대	400㎜(관로규격별1대)	5	-
장력계	대	7.5T	1	-
케이블드럼받침대	대	유압식	3	-
가스탐지기	대	유독성, 가연성가스	1	1
용량성검전기	개	AC 5～35kV	1	1
접지엘보	개	370 GLR	6	6
검전핀	개	370 TR	4	4
조작핀	대	600-AT (토오크 조정장치 부착)	2	1
플레이트컴팩터	대	엔진식 1.5T	1	-	다짐기
콘크리트 진동봉	대	(3.5HP, 45￠)	1	-
콘크리트 드릴	대		1	-	지상기기고정용
안전칸막이	개		20	10	작업시 안전확보
공사안내판	개		2	1
라바콘	개		20	10
공사용 차량	대	5톤 트럭 (카고크레인 장착)	1	-	가공용과 겸용가능
매설물탐지기	대	굴착시 지하매설물 탐지용	1	-
맨홀뚜껑개방기	개		1	1
가스제거기	대		1	-
지상기기용 상측정기	대	고압활선부 비접촉식 (엘보접촉식)	1	1

주) A : 지상기기(변압기 + 개폐기) 200대이상 보유구역의 협력업체

B : 지상기기(변압기 + 개.폐기) 10대이상 200대미만 보유구역의 협력업체

단, 매설물탐지기는 지상기기(변압기 + 개폐기) 300대이상 보유구역의 협력업체

[별표 2]

저압협력업체 필수장비(공구) 확보기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

품 명	단위	규격 및 용도	기준 수량
			A	B	C
유압식 공구	개	압착단자 14㎟-150㎟	1	1	1
접지저항 측정기	대	훅크온식	3	3	2
훅크온메타	대	전압, 전류 겸용	5	4	3
절연저항 측정기	대	1,000V, 2,000㏁	2	1	1
		500V, 1,000㏁	3	2	2
전기드릴	대	100V, 1/4마력	1	1	1
로타리해머 (진동전기압축방식)	조	-	1	1	1
절단기	대	600mm이상	3	2	2
시메라(장선기)	개	캄아롱부 1.0Ton이상	2	2	2
멀티테스터	대	-	3	3	2
COS조작봉	개	23kV용	1	1	1
절연안전모	개		12	10	8
안전허리띠	조	로프부	12	10	8
방전고무장갑	족	고압용 (1,000V)	3	2	2
보호용가죽장갑	족	고압용	3	2	2
검전기	개	80V - 7kV	2	2	1
		3.0kV-35kV(낚시대형)	3	3	2
투광기	대	차량용 포함	4	3	3
유압식압축기(수동)	대	Y-35	2	2	1
휴즈압착기	대	2.6mm-22㎟	6	6	5
누점점 탐지기	대	활선용 (옥내배선 탐지기능 겸용)	1	1	0
		사선용 (옥내배선 탐지기능 겸용)	1	1	1
다기능전압기록계	대	24시간연속 전압측정용	1	1	0
공사용 차량	대	1 톤이상 트럭	1	1	1

주) A : 추정도급액 8억원이상 지역 협력업체

B : 추정도급액 4억원이상 8억원미만 지역 협력업체

C : 추정도급액 4억원미만 지역 협력업체

주) 활선용 누전점탐지기, 다기능전압기록계 확보는 ‘02.3.31까지 유예기간 부여가능

[별표 3]

공사시공 품질 평가서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

[고압협력업체]

결재	시공부서
	과 장	부 장

○ 계약번호 및 일자 :

○ 공사번호 :

○ 공 사 명 :

○ 업 체 명 :

(대표자 :            )

NO	항 목		평 가 기 준		감 점	근 거
1	시공통보이행 불응, 무단작업		1회당 50점 감점
2	계획휴전시간 지체 계획인원 미확보		1회당 20점 감점
3	현장대리인 미상주		1회당 20점 감점
4	안전지적서 또는 시정통보서 발행		1회당 30점 감점
5	전주근입 미달 또는 근가 미시공		1개소당 30점 감점
6	전선공사시 연선로라 미사용		1회당 30점 감점
7	압축접속 불량 (접속공법 미준수 포함)		1개소당 30점 감점
8	변압기 또는 전선 오결선		1회당 30점 감점
9	접지시공 누락(접지저항 미달 포함)		1개소당 30점 감점
10	전주 등 잔자재 현장방치 및 잔토 미처리		1개소당 30점 감점
11	사급자재 손망실		1건당 30점 감점
12	공사 준공기일 지체		1일당 20점 감점
계		배 점	100점	감 점	점	평 점

① 공사건당 100점을 기준하여 현장감독, 준공검사, 간부 현장순시시 등 지적된

항목을 기준으로 평가하되 하한치는 0점

② 업체제재 항목 해당시는 기준에 의한 제재조치 병행

작성일자 : 200  .   .   .

작 성 자 :            (인)

[별표 4]

공사시공 품질 평가서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

[저압협력업체]

결재	시공부서
	과 장	부 장

○ 계약번호 및 일자 :

○ 공사번호 :

○ 공 사 명 :

○ 업 체 명 :

(대표자 :                 )

NO	항 목		평 가 기 준		감 점	근 거
1	시공통보이행 불응, 무단작업		1회당 50점 감점
2	계기지침 누락으로 요금업무 지장		1명당 20점 감점
3	현장대리인 미상주		1회당 20점 감점
4	안전지적서, 시정통보서 발행		1회당 30점 감점
5	인입주,계기사항 등 전산입력 누락 또는 착오입력		1건당 20점 감점
6	봉인불량 수용발생(미봉인, 탈락)		1개소당 20점 감점
7	시공불량으로 인한 인입선 접속 상태 불량		1개소당 20점 감점
8	이상전압 발생		1건당 30점 감점
9	접지저항 또는 절연저항 측정 등 누락		1개소당 20점 감점
10	민원 발생		1건당 50점 감점
11	사급자재 손망실		1건당 30점 감점
12	공사준공기일 지체		1일당 20점 감점
계		배 점	100점	감 점	점	평 점

① 공사건당 100점을 기준하여 현장감독, 준공검사, 간부 현장순시시 등 지적된

항목을 기준으로 평가하되 하한치는 0점

② 업체제재 항목 해당시는 기준에 의한 제재조치 병행

작성일자 : 200  .    .     .

작 성 자 :              (인)

[별표 5]

고압협력업체 종합 평가기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

구 분	항 목	적 용 대 상			평 점	상한치
1.시공 능력	1) 기계화 장비보유	오가크레인, 바켓트럭, 포크레인, 무정전장비 (변압기차, 케이블차)			대당 50점	150
	2) 상근전공 보유	6개월 이상 고용		활선전공	1명당 20점	200
				배전전공	1명당 10점
		3개월 이상 고용		활선전공	1명당 15점
				배전전공	1명당 7.5점
		3개월 미만 고용		활선전공	1명당 10점
				배전전공	1명당 5점
	3) 시공능력 평가액	법령에 의해 공고된 최근실적 기준 (한국전기공사협회 발행)			1억원당 2점	50
2.공사 시공 품질	4) 연간 공사건별 공사 시공품질 평가	누계평점÷공사시공총건수 (공사건별 평가서 작성종합)			평균평점 500점 만점으로 환산	500
3.공사 시공 관리	5) 안전사고발생 (업체귀책사고에 한함)	사 망 사 고	감전사고		1회당 -50점
			비감전사고		1회당 -30점
		중 상 사 고	감전사고		1회당 -30점
			비감전사고		1회당 -20점
		경 상 사 고	감전사고		1회당 -20점
			비감전사고		1회당 -10점
	6) 공사중 시공자 과실로 설비피해 유발	․전주되괴, 기기소손, 전선단선 등			1회당 -20점
	7) 공사중 고압정전 유발	일시고장 유발			1회당 -20점
		순간정정 유발			1회당 -10점
	8) 공사후 하자로 고압선로고장 발생	일시고장 유발			1회당 -20점
		순간정전 유발			1회당 -10점

구 분	항 목	적 용 대 상	평 점	상한치
4. 민원 (부조리) 유발	9) 업체종사원의 소송 등 민원제기	관련업체 당사자 및 종사원의 소송, 민원 등	1회당 -50점
	10) 공사시공 관련 고객민원 발생	(익명민원 제외)	1회당 -20점
	11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생	․검찰, 경찰 등 대외 조사 결과 당사 직원이 형사입 건후 구속된 경우 ․당사 직원이 감사원 등 대외 기관에 지적되어 인사조치(경고 이상)된 경우	1회당 -150점
		․본사 감사실의 조사결과 인사조치 (경고이상)된 경우	1회당 -100점
5. 공사비 절감의 기여도	12) 공량단가율에 의한 평가	100% - 공량단가율(%) = 절감율(%)	절감율 1%당 10점	100
6. 기 타	13) 전기공사 관련 수상경력	건설인상 수상업체	30점 가점
		한국전기공사협회 주관 기능경기대회 외선 또는 지중분야 최우수 수상업체	20점 가점
		1차사업소장 주관 기능 경기대회 최우수 수상 업체	10점 가점
	14) 공사품질관리	ISO인증 업체	20점 가점
	15) 공사관련 면허 보유	조경면허 또는 통신면허 겸업업체	30점 가점
합 계				1000

※ 11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생 항목의 검찰, 경찰 등 대외 조사       결과 당사 직원이 형사 입건후 구속된 경우라 함은 형확정 판결결과에 관계없이

형사입건 구속된 것 만으로 적용함

[별표 6]

저압협력업체 종합 평가기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

구 분	항 목	적 용 대 상		평 점	상한치
1.시공 능력	1) 장비(공구)보유	공사용 차량 ※ 일반 필수보유장비 비보유시 1개 품목당 20점 별도감점		대당 150점	150
	2) 상근전공 보유	일반전공 6개월이상 고용		1명당 50점	200
		일반전공 3개월이상 고용		1명당 40점
		일반전공 3개월미만 고용		1명당 30점
	3) 시공능력 평가액	법령에 의해 공고된 최근실적 기준 (한국전기공사협회 발행)		1억원당 10점	50
2.공사 시공 품질	4) 연간 공사건별 공사 시공품질 평가	누계평점÷공사시공총건수 (공사건별 평가서 작성종합)		평균평점 500점 만점으로 환산	500
3.공사 시공 관리	5) 안전사고발생 (업체귀책사고에 한함)	사망 사고	감전사고	1회당 -50점
			비감전사고	1회당 -30점
		중상 사고	감전사고	1회당 -30점
			비감전사고	1회당 -20점
		경상 사고	감전사고	1회당 -20점
			비감전사고	1회당 -10점
	6) 공사중 시공자 과실로 설비피해 유발	․전주되괴, 기기소손, 전선단선, 고객설비 소손 등		1회당 -20점
	7) 공사중 고압정전 유발	일시고장 유발		1회당 -20점
		순간정정 유발		1회당 -10점
	8) 공사후 하자로 고압선로고장 발생	일시고장 유발		1회당 -20점
		순간정전 유발		1회당 -10점

구 분	항 목	적 용 대 상	평 점	상한치
4. 민원 (부조리) 유발	9) 업체종사원의 소송 등 민원제기	관련업체 당사자 및 종사원의 소송, 민원 등	1회당 -50점
	10) 공사시공 관련 고객민원 발생	(익명민원 제외)	1회당 -20점
	11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생	․검찰, 경찰 등 대외 조사 결과 당사 직원이 형사입 건후 구속된 경우 ․당사 직원이 감사원 등 대외 기관에 지적되어 인사조치(경고 이상)된 경우	1회당 -150점
		․본사 감사실의 조사결과 인사조치 (경고이상)된 경우	1회당 -100점
5. 공사비 절감의 기여도	12) 공량단가율에 의한 평가	100% - 공량단가율(%) = 절감율(%)	절감율 1%당 10점	100
6. 기 타	13) 전기공사 관련 수상경력	건설인상 수상업체	30점 가점
		한국전기공사협회 주관 기능경기대회 외선 또는 지중분야 최우수 수상업체	20점 가점
		1차사업소장 주관 기능 경기대회 최우수 수상 업체	10점 가점
	14) 공사품질관리	ISO인증 업체	20점 가점
	15) 공사관련 면허 보유	조경면허 또는 통신면허 겸업업체	30점 가점
합 계				1000

※ 11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생 항목의 검찰, 경찰 등 대외 조사       결과 당사 직원이 형사 입건후 구속된 경우라 함은 형확정 판결결과에 관계없이

형사입건 구속된 것 만으로 적용함

[별표 7]

협력업체 종합평가서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

[고압, 저압 협력업체]

1. 업체명 :                    (담당지역 :                )

2. 대표자 :

3. 평가결과  (평가기간 :   년   월   일 ～    년   월  일)

구 분	1. 시공능력			2. 공사시공 품질		3. 공사시공관리
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
단 위	대	명	억원	누계평점	총건수	점	점	점	점
실 적
평 점

구 분	4. 민원(부조리)유발			5. 공사비 절 감 기여도	6. 기 타 (가점)			비 고	종 합 평 점
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
단 위	회	회	회	점	점	점	점
실 적
평 점

위 평가내용을 확인하고 서명 날인함.

위원장(사업소장) :              (인)

부  위  원   장  :               (인)

위   원  :              (인)     위   원 :                 (인)

위   원  :              (인)     위   원 :                 (인)

위   원  :              (인)     위   원 :                 (인)

주 1) 평가위원은 1차사업소 특수계약 심의위원회 위원으로 한다.

주 2) 종합평가는 계약기간이 종료되는 해의 12월 15일 이후에 실시한다.