	지중송전 시공 전문회사 관리기준

2009. 06. 03.  제   정

한국전력공사

송변전건설처

품질문서 관리이력

1. 제 목  : 지중송전 시공 전문회사 관리기준

2. 번 호  : 송변-송변-17-기55

개정 번호	개정내용			작성자	검토자		승인자	승인일자		비 고
유 효 성 검 토
일 자		검 토 결 과				작성부서장			비 고
		만 족	개 정

목   차

1.	목 적		‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧							1
2.	적용범위			‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧						1
3.	용어정의			‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧						1
4.	대상공사							‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧		2
5.	평가위원회 구성							‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧		2
6.	전문회사 자격요건							‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧		3
7.	전문회사 신청 및 평가절차								‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧	6
8.	전문회사 관리						‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧			10
9.	케이블 접속원 자격관리							‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧		13
10.	시공관리				‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧					15
11.	사후관리				‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧					18
12.	업체 종사자 교육					‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧				21
13.	기타사항				‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧					21
		[첨부]
		별표#1 전문회사 평가업무 절차 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧								22
		별표#2 전문회사 등록실사 신청서 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧								23
		별표#3 전문회사 평가기준 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧								27
		별표#4 전문회사 실사 보고서 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧								31
		별표#5 접속(포설)원 경력확인서 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧								32

1. 목 적

한국전력공사	공 통 기 준 서	문서번호 : 송변-송변-17-기55	개정번호 : 0
	제목 : 지중송전 시공 전문회사 관리기준	시 행 일 자 : '09. 06. 03.	페이지 : /33

지중송전설비중 조립식 접속함을 사용하는 154kV XLPE 케이블(광복합 포함)에 대한 설치 및 고장복구를 시행함에 있어 전기공사업체의 전문화와 기술수준 향상을 유도하기 위한 지중송전 시공 전문회사의 평가 및 관리를 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 전문적인 기술과 경험이 요구되는 조립식 접속함을 사용하는 154kV XLPE 케이블(광복합 포함)의 설치 및 고장복구를 수행할 수 있는 시공전문회사의 선정과 평가에 적용한다.

2.2 지중송전선로 시공 전문회사의 활용과 사후관리에 적용한다.

3. 용어 정의

3.1 본사 주관부서

지중송전 시공 전문회사 관리업무를 총괄하는 본사 담당부서를 말한다.

3.2 시공 전문회사

지중송전 케이블의 설치 및 고장복구공사의 시공을 전담하는 전기공사업 등록업체로서 전문회사 등록을 필한 업체를 말한다.

3.3 필수 인력

기준서에 명시된 소정의 자격을 갖추고 지중송전 시공 전문회사 관리시스템에 등록된 케이블 접속 및 포설인력을 말한다.

3.4 양성 교육

지중송전 케이블 접속원을 신규 양성하기 위해 시행하는 교육으로대한전기협회에서 주관하는 지중송전 전기원 양성교육을 말한다.

3.5 기능향상 교육

지중송전 시공전문회사 필수인력의 기능향상과 실무지식 습득을 위하여 당사에서 시행하는 교육을 말한다.

4. 대상공사

조립식 접속함을 사용하는 아래의 154kV XLPE 케이블(광복합 포함) 공사를 대상으로 한다. 단, 케이블 직접매설공법 적용공사는 제외한다.

4.1 지중송전 케이블의 설치(이설, 대체, 재사용 철거 포함)공사

4.2 지중송전 케이블의 고장복구공사

5. 평가위원회 구성

5.1 평가위원회 설치

5.1.1 평가위원회는 심사위원회와 실사반으로 구성한다.

5.1.2 실사반은 전문회사로 등록을 희망하는 업체의 인력, 장비, 시공품질 확보능력 등의 현장실사를 시행한다.

5.1.3 심사위원회는 실사반에서 시행한 실사내용을 종합 심사하여 전문회사 신규등록 및 자격 유효기간 연장여부를 결정하며, 전문회사 제재 및 자격취소에 관한 사항을 심의한다.

5.2 심사위원회

5.2.1 위원장 : 송변전건설처장

5.2.2 위  원 : 송전건설팀장, 송전운영팀장, 송변전기술팀장, 기타 심사

위원장이 임명한 자

5.2.3 간  사 : 송전건설팀 담당 부장

5.3 실사반

5.3.1 반  장 : 송변전건설처장이 임명한 2직급 지중송전분야 보직자

5.3.2 반  원 : 송변전건설처장이 임명한 3직급이하 지중송전분야 보직자로 3명 이내로 구성

5.4 임 무

5.4.1 본사 주관부서

㈎ 전문회사 자격 관리

㈏ 필수 인력의 자격인증(승급 포함)평가

㈐ 전문회사 등록 신청서류 검토

㈑ 실사반 구성

5.4.2 심사위원회

㈎ 신규등록 실사결과에 대한 심사

㈏ 자격취소 심사

㈐ 전문회사 제재 심사

㈑ 전문회사 유효기간 연장 심사

5.4.3 실사반

㈎ 실사계획 수립

㈏ 실사 수행

㈐ 실사결과 평가 및 보고

6. 전문회사 자격요건

6.1 업체 기본요건

전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체(제재중인 부정당업자 제외)

6.2 필수인력 확보

6.2.1 전문회사로 신규등록 및 연장을 하고자 하는 업체는 체계적인 품질확보 업무 수행을 위한 품질관리 전문인력 및 필수인력을 별표#3 전문회사 평가기준의 3항「인력확보」기준에 적합하게 확보하여야 한다.

6.2.2 작업팀의 구성은 한전의 케이블 접속원 관리시스템에 등록된 접속팀과 포설팀으로 다음과 같이 구성하여야 한다.

㈎ 접속팀은 최소 팀장 1명 및 팀원 2명으로 하며, 접속팀 최소 인원 구성은 한전의 접속원 자격기준인 1, 2, 3급 각 1명으로 구성하여야 하되 2, 3급 팀원은 1급 또는 2급으로 대체할 수 있다.

㈏ 포설팀은 최소 팀장 1명 및 팀원 5명으로 구성하여야 한다.

6.2.3 전문회사는 공사의 시공품질 확보 차원에서 품질관리 전문인력을 별도로 확보하여야 한다.

6.2.4 실사 완료 후 승인된 작업팀 편성 현황은 등록완료시 까지 변경 없이 유지하여야 하나, 본인 사망, 자격취소 등 불가피한 사유발생시는 본사 주관부서의 승인을 득한 후 변경한다. 단, 포설팀은 전문회사 등록 전까지 편성 현황을 본사 주관부서에 제출하여 승인을 받아야 한다.

6.2.5 작업팀으로 편성 승인된 후 6개월이 지나지 않은 타 전문회사 소속의 필수인력을 영입하여 현장 작업팀으로 신규편성 또는 변경하고자  할 경우 소속변경 후 최소 6개월 이상 연속근무 경력이 있어야 작업팀 편성이 가능하다.

6.3 장비확보

6.3.1 전문회사로 지정을 받고자 하는 업체는 별표#3 전문회사 평가기준의

2항「장비확보」기준에 따라 장비를 구비하여야 하며, 필수장비는  한전에서 시행하는 전문회사 평가 절차에 의한 장비 실사를 받고 적격 판정을 받아야 한다.

6.3.2 전문회사의 필수장비는 구입 또는 자격인정 기간 동안 임차로     확보한 후에 실사를 받아야 한다. 단, 임차의 경우 계약기간이 명시된 임대차 계약서로 확인하며, AC 내전압시험기를 제외한 모든 장비의 전문회사간 임대차 계약은 인정하지 않는다.

6.3.3 지중송전선로용 AC 내전압시험기는 구입하여 활용하거나 임차로 확보하여야 하며, 임차인 경우에는 공사 준공시험 예정일 1개월 전 까지 임대차계약서 사본을 시공부서에 제출하여야 한다.

6.3.4 규격요건에 정한 장비성능의 적격여부는 실사 및 실증시험을 받거나 공인기관의 인정 유효기간 이내 시험성적서 또는 제작업체 품질보증서로 대체할 수 있다.

6.4 시공품질 확보

6.4.1 지중송전 케이블공사의 품질확보를 위해 품질보증 구매시방서(송변전분야)에 만족하는 품질보증계획서(QP)를 제출하여 검토(Review & Comment)를 받아야 한다.

6.4.2 품질보증계획서는 조직체계, 안전관리 및 시공절차서 등을 포함하는 품질관리 종합계획서를 기본으로 한다.

6.4.3 전문회사는 실사결과 적격업체로 확정 후 시공품질을 확보하기 위해 당사 “154kV XLPE 케이블 및 접속함 장기과통전시험 규격서”에 의거 케이블 및 접속함을 포함한 전체 케이블 시스템의 장기 신뢰성 확보를 위한 PQ(Pre-qualification) Test를 시행하여야 한다.

6.4.4 PQ Test의 합격여부는 국제시험기관 인정기구협의회의 상호 인정협정에 서명한 인정기구로부터 인정받은 공인시험기관 또는 한전에서 지정하는 기관에서 시행한 시험성적서로 당사에서 판정하며,  판정결과 적격업체에 한하여 전문회사로 최종 확정․등록한다.

7. 전문회사 신청 및 평가절차

7.1 신규 전문회사 신청을 희망하는 업체는 다음 각호의 서류(별표#2)를 본사 주관부서에 제출하여 적합여부를 확인 받아야 한다.

㈎ 전문회사 등록 실사신청서

㈏ 회사 현황

㈐ 관련 인‧허가 또는 면허증 사본

㈑ 작업팀 편성 현황(경력확인서 포함)

㈒ 장비 보유 명세서

㈓ 품질보증 계획서

㈔ 등록인력의 재직증명서[국민연금관리공단에서 발행하는 국민연금전산 정보자료 자격원부 및 건강보험증 사본 첨부(자격 득실확인서 포함)]

7.2 본사 주관부서는 신청 업체가 제출한 서류를 검토하여 구비 요건을 만족 할 경우 해당업체를 실사 대상업체로 선정한다.

7.3 실사 시행지시

7.3.1 송변전건설처장은 업체 평가를 위해 실사반장과 실사반원을 임명하고, 신청회사가 다수인 경우 전국적으로 동일 시간대에 일제히 실사가 가능하도록 실사일정을 확정한다. 단, 불가피하게 동일 일자에 실사가 불가능할 경우는 지정 실사일자의 1개월 이내에 실사가 완료되도록 한다.

7.3.2 실사반원은 실무경험과 보직을 감안하여 구성한다.

7.4 실사계획 수립

7.4.1 실사반장은 실사 계획을 수립 후 가능한 실사 5일전까지는 대상업체에 통보하여야 하며, 실사 계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

㈎ 실사목적 및 범위

㈏ 실사일정 및 실사자 명단

㈐ 기타 필요사항

7.5 대상업체 실사

7.5.1 실사반은 전문회사 등록 실사 신청시 제출된 작업팀 편성현황과 기타 자격사항의 변동여부를 재확인하여 변경 사항이 있을 경우 부적격 처리토록 한다.

7.5.2 실사반은 다음과 같이 장비보유 현황과 그 성능을 확인, 점검한다.

㈎ 장비는 필수와 일반으로 구분하며, 실사는 팀 단위로 수행

㈏ 1개 팀 이상일 경우 작업팀별로 각각 구분하여 실사 시행

㈐ 업체의 장비보관 창고 또는 야적장에서 현장 실사를 시행하며, 필요시 실증시험 시행

㈑ 보유사실 확인(구입 증빙서류, 자격 인정기간 이상 임대차 계약서류)

㈒ 규격 확인(제작회사, 제작년도, 제작번호, 형식, 검교정년월 등)

㈓ 성능 확인(장비요건표상의 성능과 동등 이상, 작동여부 등)

㈔ 공인기관의 인정유효기간 이내 시험성적서 또는 제작업체 품질보증서

7.5.3 실사반은 다음과 같이 기술인력 확보현황과 기술보유 능력을 확인, 점검 및 평가한다.

㈎ 팀 단위로 실사하며, 필요시 현장 실증시험 시행

㈏ 품질관리 전문인력 확보 여부

㈐ 필수인력 자격, 경력증명서 및 기술자격보유 여부

㈑ 재직증명서[국민연금관리공단에서 발행하는 국민연금전산 정보자료 자격원부 및 건강보험증 사본 첨부(자격 득실확인서 포함)]

7.5.4 실사반은 다음과 같이 대상업체의 시공품질 확보능력을 확인한다.

㈎ 케이블 포설 및 접속 절차서 등 종합적인 “품질보증계획서”의 적정

수립 및 관리 여부

㈏ 제작사별 케이블 접속 상세도면 및 시공 매뉴얼 보유 여부

㈐ 주요 장비의 취급설명서

7.6 실사결과 평가

7.6.1 실사반장은 업체요건, 인력, 장비 및 시공품질 확보 능력 등 각종 분야에 대해 별표#3의 전문회사 평가기준에 의거 종합 검토하여 적격, 부적격 업체로 판정한다.

7.6.2 업체가 제출한 현황이나 장비의 성능에 대한 불만족 사항 발견시 대상업체 대표로부터 7일 이내에 시정조치 의사를 서면으로 요청받는 경우는 조건부로 승인 가능하다.

㈎ 다음과 같은 조건부 승인의 경우 그 내용을 실사보고서의 종합 의견란에 기록하여 보고한다.

① 장비주문(수입품 등)은 되어 있으나 현장 미도착

② 기기성능 확인 결과 부품결함 등으로 만족한 성능 미달

③ 공인기관의 인정유효기간이내 시험성적서 또는 장비제작업체  품질보증서 제출미흡

㈏ 실사반장은 30일 이내에 재 실사를 시행하여 장비의 수리, 신규

구입 또는 임차여부 등 불만족 사항을 재확인 후 그 결과를 송변전건설처장에게 추가 보고한다.

7.7 실사결과 보고

실사반장은 별표#3의 전문회사 평가기준 및 기타 실사내용이 첨부된 별표#4의 실사결과 보고서를 상세하게 작성하여 송변전건설처장에게  보고한다.

7.8 심사위원회 개최

7.8.1 실사반에서 시행한 실사내용을 종합 심사하여 다음의 합격점수를  만족할 경우, 송변전건설처장은 신규등록 또는 유효기간 연장여부를  확정한다. 다만 유효기간 연장은 7.8.2항의 조건을 만족하여야 한다.

항 목		배 점	합격(목표)점수
업체 기본요건		필수	필수
장비확보		300	300
인력확보		300	300
품질보증		50	40 이상
시공 실적	신규	0	-
	연장	350	340 이상
점수 합계	신규	650	640 이상
	연장	1,000	990 이상

7.8.2 전문회사의 유효기간 연장을 위한 시공실적 조건은 다음과 같으며 해당 조건을 만족하여야 한다.

유효기간 기준 5년 이내 별표 #3의 4항 시공능력 산정기준에 따라 조립식 접속함을 사용한 154kV XLPE 케이블(광복합 포함)공사 시공실적이 있고, 자격 인증된 필수 인력 보유 및 필수인력 전원이 당사에서 시행하는 기능향상교육 이수

8. 전문회사 관리

8.1 전문회사 관리부서

8.1.1 전문회사의 관리는 본사 주관부서에서 담당하며 다음과 같은 업무를

시행한다.

㈎ 지중송전 시공 전문회사 관리기준 제․개정

㈏ 심사위원회 및 실사반 운영

㈐ 신규등록 실사신청 접수, 적격여부 실사 및 심사 승인

㈑ 전문회사의 연장 신청 접수, 적격여부 실사 및 심사 승인

㈒ 전문회사의 인력, 장비 등 변동사항 발생시 적격여부 실사 및 심사 승인

㈓ 전문회사의 인력, 장비, 공사실적, 제재 등의 현황 및 변동사항의 전문회사관리시스템 입력관리 업무

㈔ 면허취소, 면허수첩 발급 및 면허수첩 기재내용 변경

8.2 면허수첩 활용

8.2.1 전문회사 작업팀별로 면허수첩을 발급하여 공사계약 및 작업현장에 활용한다.

8.2.2 면허수첩은 공종별 인력 및 장비현황을 기록 관리한다.

8.2.3 시공부서는 불법하도급 및 부실시공 방지를 위해 연속공사의 경우  공사 기간동안 면허수첩을 제출받아 인력 및 장비를 확인하며, 비연속 공사 기간중에는 매일 작업 착수 전 면허수첩을 제출 받아 인력 및 장비를 확인하며 작업 완료 후 전문회사에 반환한다.

8.3 유효기간

8.3.1 전문회사의 자격 유효기간은 5년으로 한다.

8.3.2 해당 전문회사는 유효기간 만료 3개월 전에 본사 주관부서에 문서로 유효기간 연장을 위한 실사를 요청한다.

8.3.3 본사 주관부서는 문서접수 후 1개월 이내에 8.5.3항의 내용을 재실사하여 적격한 경우 심사위원회를 개최, 연장 승인여부를 최종심의   결정 통보한다.

8.4 자격부여

8.4.1 공사 시공부서장은 유자격 전문회사의 최신 목록을 계약부서에 제공하여야 한다.

8.4.2 계약부서장은 해당공사 입찰시 해당 유자격 업체에 한하여 입찰참가자격을 부여한다.

8.4.3 공사 시공부서는 적격 심사시 낙찰예정자의 타 공사 계약 및 시행여부를 확인하여 작업팀의 중복 투입 및 불법 하도급을 사전 예방하여야 한다.

8.5 자격취소 및 제재

8.5.1 공사 시공부서는 11.1항의 제재사유가 발생하면 그 사실을 계약부서 및 본사 주관부서에 7일 이내 통보하고, 필요한 조치를 취하여야 한다.

8.5.2 본사 주관부서는 통보내용을 전문회사별로 누적 관리하여 입찰참가 자격을 제한하여야 하며, 자격취소 제재기준에 해당될 경우에는 심사위원회에 심사를 요청한다.

8.5.3 등록된 업체가 유효기간이 도래되어 재 실사를 요청시 아래 사항을 재 실사 한다.

㈎ 별표#3(전문회사 평가기준)의 업체요건, 장비확보, 인력확보기준과  7.8.2항의 유효기간 연장을 위한 시공실적 조건 및 7.8.1항의 “연장  조건”의 합격점수 만족 여부

㈏ 전문회사 유효기간 동안 면허수첩에 등재된 인원이 당사에서 시행하는 기능향상교육 이수 여부

8.5.4 위 항의 실사 결과 결격사유 발생시에는 1회에 한하여 30일 이내에

자격을 구비토록 하여 재 실사를 하며, 재 실사시에도 결격 사유 발생시 자격 구비시 까지 해당 자격을 중지시킨다.

8.5.5 케이블 접속원의 시공참여제한, 필수인력 부족 등 사유로 작업팀 편성이 곤란한 경우 작업팀 재편성 완료시까지 당해 전문회사의 입찰참가자격을 제한한다.

8.6 면허 반납 또는 자격 취소

8.6.1 전문회사 면허 반납 또는 자격취소 등 제재사유가 발생할 경우 본사 주관부서는 해당 전문회사의 자격을 즉시 취소한다. 이 경우 진행중인 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

8.6.2 전문회사의 면허 반납 또는 자격 취소사유 발생시는 면허 취소일로부터 1년이 경과하여야만 7항의 절차에 의거 재등록 신청을 할 수 있다.

9. 케이블 접속원 자격 관리

9.1 자격관리

전문회사 소속 케이블 접속원에 대한 자격관리는 본사 주관부서에서 시행한다.

9.1.1 전문회사는 케이블 접속원에 대한 직책별․등급별 자격관리를 위해 전문회사 등록전에 접속원의 접속경력확인서와 재직증명서를 구비

하여 당사의 케이블 접속원 관리시스템에 등록요청을 하여야 한다.

9.1.2 케이블 접속원의 등급별 자격기준은 아래와 같다.

등 급	자 격 기 준
1급	XLPE 접속원 경력 10년 이상으로 이론과 기능을 보유 하고 접속작업 및 총괄이 가능한 자
2급	XLPE 접속원 경력 5년 이상으로 이론과 기능을 보유 하고 독자적 접속작업이 가능한 자
3급	XLPE 접속원 경력 2년 이상으로 이론과 기능을 보유 하고 1급 및 2급의 감독아래 접속작업이 가능한 자

9.1.3 케이블 접속원의 경력 산정은 제출된 경력확인서의 접속 실 작업  기간을 월 단위로 누계 합산하여 경력기간을 산정하고, 1년 미만은 절사 후 관리등급을 부여하며, 경력확인서 확인 결과 제출내용이 허위로 판명시는 케이블 접속원의 자격을 취소한다. 또한 11.1.2항 8에 준하여 전문회사를 제재한다.

9.1.4 케이블 접속원의 승급을 제외한 경력 변경사항은 매년 11월 30일까지 본사 주관부서에 경력확인서(변경분에 한함)를 제출하며, 확인 결과 적격한 경우 케이블 접속원 관리시스템에 등록한다.

9.1.5 전문회사는 소속 접속원의 결원 발생 또는 기존의 접속팀 구성원을 대체할 경우, 케이블 접속원 관리시스템에 등록된 동등 자격을 보유한 접속원으로 대체한 후, 본사 주관부서에 즉시 통보하며, 본사 주관부서는 전문회사 면허수첩에 변동사항을 기입․서명하고 케이블 접속원 관리시스템에 등록한다.

9.1.6 케이블 접속원의 자격 반납 또는 취소 등의 사유가 발생한 때에는  자격 취소일로부터 1년 이내에는 자격을 재취득할 수 없다.

9.2 자격의 승급

9.2.1 케이블 접속원의 승급신청은 수시로 하며, 본사 주관부서는 승급신청 관련 업무를 수행하고 승급이 적격한 경우 승급여부를 결정 후 승인한다.

9.2.2 본사 주관부서는 케이블 접속원의 승급 확정시 전문회사의 면허  수첩에 자격 변동사항을 기입․서명하고 케이블 접속원 관리시스템에 즉시 등록한다.

9.3 부실시공 접속원의 공사 참여 제한

9.3.1 전문회사 소속 접속원이 아래 사유로 인한 설비고장 유발시 11.1항 “전문회사 제재”와 별도로 해당 접속원에 대한 시공참여를 제한한다.

㈎ 준공시험시 발생한 케이블 접속불량으로 인한 고장

㈏ 하자보수보증기간내 발생한 케이블 접속불량으로 인한 고장

9.3.2 위 항에 따른 시공참여 제한기간은 아래와 같다.

㈎ 접속불량 고장 1회 발생 :  2개월

㈏ 접속불량 고장 2회 발생 :  6개월

㈐ 접속불량 고장 3회 발생 : 12개월

9.3.3 지중송전선로 고장발생시 사업소 건설 및 운영부서는 고장원인 분석결과 시공불량으로 판명시 즉시 본사 주관부서에 통보하며, 본사 주관부서는 케이블 접속원 관리시스템 및 시공 전문회사 관리시스템에 접속원 제재사항을 등록하고 전문회사에 통보한다.

9.4 케이블 접속원 양성

9.4.1 신규 케이블 접속원의 등록을 위해서는 대한전기협회에서 주관하는 8주간의 지중송전 전기원 양성교육 과정을 수료하여야 한다.

9.4.2 지중송전 전기원 양성교육 과정을 수료한 접속원이 9.1.2항의 3급 자격을 취득하기 위해서는 2년간의 현장 접속작업에 참여한 경력이 있어야 한다.

9.4.3 제작업체에서의 접속원 경력을 보유하고 퇴직일 기준 5년 이내인  접속원은 대한전기협회에서 주관하는 8주간의 지중송전 전기원 양성교육 과정 및 당사에서 지정하는 기관에서 4주간의 접속 실습과정을 수료한 후 9.1.2항의 해당 등급별 자격기준을 부여한다. 다만, 퇴직일 기준 1년 이내의 경우는 상기 교육을 면제한다.

10. 시공관리

10.1 공사설계

공사 발주부서는 전기품셈 및 실적공사비 단가를 적용하여 공사설계서를 작성하여야 한다.

10.2 계약금액

공사 발주부서는 10.1항에서 작성한 설계명세서를 계약담당부서에 통보

하여야 하며 계약담당부서는 이를 기초로 사정금액을 결정한다.

10.3 계약자 선정 및 계약체결

10.3.1 낙찰예정자의 자격확인

공사 발주부서는 낙찰예정자로 통보받은 회사의 전문회사 자격요건중 면허수첩에 기재된 장비 및 인력확보 현황을 현장실사를 통해 확인한다.

10.3.2 계약담당부서는 공사발주부서의 통보결과, 전문회사 필수자격 조건을 구비한 경우에 한하여 최종 낙찰자로 확정하고 계약을 체결한다.

10.3.3 현장 실사결과 결격사항 발생시 11.1.2항의 해당 제재기준을 적용한다.

10.4 현장관리

10.4.1 모든 공사는 현장대리인 입회하에 전문회사가 적정 인력과 장비를 활용하여 책임시공 하여야 한다.

10.4.2 공사감독은 매일 작업 착수 전 필히 전문회사 면허수첩 목록의 인력(신분증 대조)과 기준서에 명시된 동등 이상의 장비가 현장에 투입되었는지를 확인하여 불법 하도급을 근절함으로써 안전작업이 되도록 한다.

10.4.3 출입자 명부 및 작업일지에는 전문회사 출입신청서 목록에 기록된 사항을 비교하여 실제 공사에 투입되는 인력만 기록한다.

10.4.4 전문회사는 필수장비 요건에 정한 규격과 동등 이상의 성능 및 안전성이 있는 장비를 자격인정 기간동안 보유하여 지속적인 실용성을 유지시켜야 한다.

10.4.5 필수장비 및 인력은 단위공사 1개 현장에 1개팀을 투입하여 공사를 시행하는 것을 원칙으로 한다. 단, 1개팀이 타 공사현장에 휴전시간이 중복되지 않는 범위 내에서 순차적인 투입은 가능하다.

10.4.6 장비의 손‧망실 등이 발생시 즉시 보완하여 현장투입에 차질이 없어야 하며, 신규구입 등으로 장비 이력이 변경된 경우에는 14일 이내에 본사 주관부서에 통보하고 실사를 받아야 한다.

10.4.7 작업팀의 인력 결원시 즉시 보충 하여야 하며, 변경 사실을 7일 이내에 본사 주관부서에 통보하여 확인을 받아야 한다.

10.5 안전관리

전문회사는 공사현장의 안전관리에 대한 책임을 지며, 당사 전기안전보건관리규정 제36조 2항의 안전관리 계획서를 착공 전 시공부서에 제출한다.

10.6 기성 및 준공검사

계약자는 일정기간 시공한 물량에 대한 기성검사 및 시공완료에 따른  준공검사를 요청하여야 하며, 발주부서는 기성검사 및 준공검사 요청서를 접수하면 시공 상태를 확인하여 기성 및 준공검사를 실시한다.

10.7 전문회사 시공능력 향상

10.7.1 전문회사는 종사자들의 시공능력 향상을 위해 사내․외의 직무교육을 수시로 수강하여 전문 인력의 자질을 향상시켜야 한다.

10.7.2 전문회사를 대상으로 하는 공사의 적격심사기준에「최근 5년 이내 업체가 비용을 부담하여 신규 지중송전 케이블 접속원을 양성한  실적을 반영」하여 운영할 수 있다.

10.8 기타사항

본 기준의 시공관리에 관한 사항은 당사「공사 및 표준품셈관리규정」에 따른다.

11. 사후관리

11.1 전문회사 제재

11.1.1 계약기간중 공기업․준정부기관 계약사무규칙에 규정된 사항 외에 다음에 따라 전문회사를 제재한다.

11.1.2 항목별 제재기준(최근 3년간 누계횟수 및 점수)

구 분	입찰참가 자격제한		전문회사 자격취소
	3개월	6개월
1. 시공지시불응 또는 계약위반 사항 시정요구 불응	1회	2회	3회
2. 공사하자 또는 작업자 과실로 고장이 발생한 경우	1회	2회	3회
3. 안전사고 발생	80점	100점	200점
4. 불량자재 사용	1회	2회	3회
5. 안전 또는 시공품질 지적	3회	4회	5회
6. 휴전시간 30분이상 지연 (당사 사유분 제외 및 지장전력 발생 경우)	1회	2회	3회
7. 면허수첩의 필수인력과 지침에 명시된 동등 이상의 장비가 투입되지 않은 경우	1회	2회	3회
8. 인력, 장비 정기실사시 결격 사항 발생 (실사횟수 기준, 결격에 의한 재실사 실적 포함)	1회	2회	3회
9. 뇌물수수 등 부조리로 인한 형사입건후 1심 유죄판결 경우	-	-	1회
10. 장비, 인력변동시 지정된 기한내에 관리 부서에 통보하지 아니한 경우	2회	3회	4회
11. 공사시공 중 신규공사 추가 입찰로 관련 공사(휴전중복 등) 적기준공에 차질 발생 시(낙찰 포기경우 제외)	1회	-	-
12. 불법 하도급이 판명될 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 의거 입찰참가자격을 제한한다.

주1)「공사하자」라 함은 업체의 시공 잘못 등으로 하자기간동안 동 선로의 품질 및 성능이 확보되지 못하여 당해 기기의 고장이 발생 또는 확대된 경우를 말한다.

주2)  자격취소 후 1년이 경과하여야만 전문회사 신규등록 신청을 할 수 있다.

주3) 장비, 인력변동으로 전문회사 자격요건에 부적합한 상태에서의 입찰참가 및 공사시공은 불가하며, 위반 사항이 발견될 시는  위반 횟수에 따라 7. “면허수첩의 필수인력과 지침에 명시된 동등 이상의 장비가 투입되지 않은 경우“에 준하여 제재한다.

11.1.3 상기 각항의 제재기준에 해당되는 사항은 8.5항에 의거 처리한다.

11.1.4 안전사고에 대한 제재점수 산정기준치(1인당)는 다음과 같으며, 업체의 귀책사유로 판정된 경우에만 적용한다.

㈎ 감전사고 : 사망(50점), 중상(30점), 경상(15점)

㈏ 비감전사고 : 사망(30점), 중상(20점), 경상(10점)

11.1.5 제재기준 동시 발생시 제재기준이 높은 1개 항목만 적용한다.

11.2 전문회사 자격 정기실사

11.2.1 전문회사 자격관리를 위하여 필요시 인력, 장비의 구비기준에 대한 정기실사를 동일 일자에 시행할 수 있다.

11.2.2 결격사유 발생업체는 실사 30일 이내에 결격사항을 구비하여 재 실사(2차)를 받아야 하며, 2차 재 실사에서도 불합격 할 경우, 재 실사일 기준 30일 이내 3차 재 실사를 받아야 하며 3차 실사에서도 불합격할 경우에는 해당 자격을 취소한다.

11.2.3 정기실사 결과 결격사항 발생시 11.1.2항의 해당 제재기준을 적용한다.

11.3 불법하도급 현장 확인

11.3.1 불법하도급 공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 전문회사의 불법 하도급여부(면허수첩에 등재된 인력 및 장비보유 현황 등)를

아래와 같이 확인한다.

㈎ 본사점검

① 확인책임자 : 송변전건설처장이 임명한 자(점검반 구성 : 2～3명)

② 실사회수 : 필요시 수시 시행

㈏ 사업소점검

① 확인책임자 : 사업소장이 임명한 자(점검반 구성 : 2～3명)

② 실사회수 : 년 1회(필요시 수시 시행)

11.3.2 불법 하도급이 판명될 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 의거 입찰참가자격을 제한하며, 자격 유효기간중 2회 이상 불법 하도급 지적시 자격을 취소한다.

11.4 지중송전 시공 전문회사 관리시스템 운영

11.4.1 본사 주관부서는 지중송전 시공 전문회사 신규등록 승인 및 변경사항 발생시는 지중송전 시공 전문회사 관리시스템에 해당자료를 즉시 등록한다.

11.4.2 본사 주관부서는 전문회사 및 필수인력에 대한 제재사항 결정시 해당 내용을 지중송전 시공 전문회사 관리시스템에 즉시 등록한다.

11.4.3 본사 주관부서는 전문회사 필수인력의 경력 변경사항 및 결원 발생시 시공 전문회사 관리시스템에 즉시 등록한다.

11.5 고장복구 절차 및 하자판정위원회 운영

11.5.1 지중송전 케이블 및 접속함 고장발생시 하자판정과 관계없이 당해

설비의 제작업체는 고장복구에 필요한 소요자재를 조달하고, 시공전문회사는 고장복구를 즉시 시행한다.

11.5.2 고장원인을 규명하고, 정확한 하자판정을 위해 한전, 제작업체 및 시공 전문회사간 동수(同數)의 위원으로 하자판정위원회를 구성하여 운영한다.

11.5.3 하자판정 위원 상호간 이견으로 하자판정 불가시 외부기관(한국전기연구원 또는 대한상사중재원)에 의뢰하여 하자판정을 시행하며, 판정결과에 따라 원인제공자가 복구에 소요된 비용을 부담한다.

12. 업체 종사자 교육

본 지침에 의거 등록된 전문회사의 필수인력은 전문회사 유효기간 동안 당사에서 시행하는 기능향상 교육에 참석 하여야 하며, 유효기간 연장시 등 당사에서 요구시는 교육필증을 제출하여야 한다. 단, 교육비는 교육대상자를 추천한 시공 전문회사에서 부담한다.

12.1 교육대상 : 재해방지책임자, 현장대리인, 품질관리 전문인력, 필수인력, 일반기능인력 등

12.2 교육시기 및 장소 : 한전 Kepco Academy (1회/년, 2일간)

13．기타사항

본 기준에 명기되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 공기업․준정부기관 계약사무규칙, 당사 계약규정, 공사 및 표준품셈 관리규정 등에 따른다.

부    칙

이 기준은 '09년 6월   일 부터 적용한다.

별표#1

전문회사 신규등록 평가업무 절차

순서		업무내용		시행부서		소요기간
1		등록 실사신청서 접수/검토		송변전건설처		수시
		￭인력․장비 편성 적합 검토 ￭기타 업체요건 검토
		ꀻ
2		실사 시행지시		송변전건설처장		수 시
		￭실사반장 임명
		￭실사일정 지정
		ꀻ
3		세부 실사계획 수립		실사반장		3 일
		￭실사반 구성 ￭대상업체 선정 및 일정협의
		ꀻ
4		대상업체 실사 수행		실사반(장)		3 일
		￭전문회사 평가기준에 의거
		ꀻ
5		실사결과 평가		실사반(장)		5 일
		￭평가기준 및 보고서 작성
		ꀻ
6		실사결과 보고		실사반장		2 일
		￭실사반장 → 송변전건설처장
		ꀻ
7		「심사위원회」 개최		송변전건설처		5 일
		￭실사결과 심사 ￭전문회사 추천
		ꀻ
8		전문회사 확정		송변전건설처장		3 일
		ꀻ
9		심사결과 통보		송변전건설처		1 일
		￭한전 → 전문회사
		ꀻ
10		PQ Test 신청서 접수/검토/승인		송변전건설처		7 일
		ꀻ
11		PQ Test 의뢰		시공전문회사		1 일
		￭전문회사 → 공인시험기관
		ꀻ
12		전문회사 등록		송변전건설처		7 일
		￭PQ Test 성적서 접수/검토/승인 ￭전문회사 관리시스템 등록

별표#2

전문회사 등록 실사신청서

귀사의 지중송전 케이블 설치 및 고장복구 공사의 전문회사로서 자격을 받고자 아래와 같이 전문회사 평가대상 업체로 등록을 신청하오니, 현장 실사하여 주시기 바랍니다.

1. 회 사 명  :

2. 주    소  :

(대표전화 :                           )

3. 대 표 자  :                       (인)

4. 작업팀 편성 : (포설      팀),   (접속      팀)

※ 첨 부 :	① 회사 현황
	② 관련 인․허가 또는 면허증 사본
	③ 작업팀 편성현황(재직증명서 및 경력확인서 포함)
	④ 장비보유명세서
	⑤ 품질보증계획서
	⑥ 전기공사협회 발행 공사실적 확인원(공사별, 년도별)

200  .    .    .

한  국  전  력  공  사     사  장  귀 하

[별표#2-1]

회 사 현 황

회 사 명			대표자성명
(한 자)			(한 자)
소 재 지	본 사 (전기공사업등록지)		Tel
			Fax
	사 무 소		Tel
			Fax
			Tel
			Fax
자 본 금			창립년월
보수업종			전년매출액
등록종별			등록업종
회사연혁

[별표#2-2]

작업팀 편성 현황

구 분		직책	성명	자 력 사 항
				생년월일	자격증	입사(예정)일	경력(개월)
품질관리전문인력
포 설 제1팀
포 설 제2팀
접 속 제1팀	1급
	2급
	3급
접 속 제2팀	1급
	2급
	3급

주1) 개인별 이력 및 경력확인서는 별도 첨부

[별표#2-3]

장비 보유 명세서

구 분	장 비 명	규 격	단위	수량	제작사	제작년월 (검교정년월)	제작번호
필 수
일 반

별표#3

전문회사 평가기준

1. 업체요건

○ 전기공사업 등록업체로서 전문회사 등록을 필한 업체를 말한다.

2. 장비확보

공종별	구분	장 비 명	규 격	평가배점	상한 점수
포 설	필수	① Caterpillar Set	주1) 참조	[필수 장비] ◦필수장비 완비 : 300점 ◦필수장비 1종 부족시 : 0 점 (불합격)	300점
		② 바닥형 구동 롤러	300kg
		③ 윈치	5ton
		④ Tension Meter	10ton
		⑤ Roller Set	주2) 참조
		⑥ 드럼받침 Set	주3) 참조
		⑦ 가스측정기	Portable CO,O2,H2S,가연성가스, 탄산가스 측정용
		⑧ 피복절연내력시험기	10kV
		⑨ 휴대용 발전기	5kW
		⑩ 양수기	2HP
	일반	① Impact Wrench	220V
		② Hammer Drill	220V
		③ 통신장비 Set	주4) 참조
		④ 환풍기	220V

공종별	구분	장 비 명	규 격	평가배점	상한 점수
접 속	필수	① Band Heater	220V,500W,5m 주5) 참조	[필수 장비] ◦필수장비 완비 : 300점 ◦필수장비 1종 부족시 : 0 점 (불합격) ※ 지중송전용 AC 내전압시험기는 평가제외	300점
		② Belt Sander	220V, 550W
		③ 도체 노출기	-
		④ 절연체 홈 가공기	-
		⑤ 고무슬리브 삽입기 Set	주6) 참조
		⑥ 도체슬리브 압축기 Set	주7) 참조 220V, 150ton
		⑦ 접지단자 압축기 Set	220V, 25ton
		⑧ 광접속기 Set	주8) 참조
		⑨ 광접속 시험기 Set	주9) 참조
		⑩ 가스측정기	Portable CO,O2,H2S,가연성가스, 탄산가스 측정용
		⑪ 지중송전용 AC 내전압시험기	공진형, 260kV, 83A
	일반	① Megger	1000V, 2000㏁
		② 레버블럭	1ton
		③ 히터건	220V, 2000W
		④ Torque Wrench	400～1800Kgf-㎝ (M12～M28)

[주1] Caterpillar Set : MC-1000 2대, MC-350 35대

[주2] Roller Set : 직선부용 220개, 굴곡부용 15개

[주3] 드럼받침 Set : Shaft 1개, 받침대 2개, Oil Pressure Jack(20ton) 2개

[주4] 통신장비 Set : 무선 및 유선 각 1Set 포함

[주5] Band Heater Set : 온도 Controller 포함

[주6] 고무슬리브 삽입기 Set : 고무슬리브 밀대, 레일, 고무슬리브 삽입고깔 등 포함

[주7] 도체슬리브 압축기 Set : Dies, 압축홀더, 압축펌프 등 포함

[주8] 광접속기 Set : 광Cutter, 광Stripper 등 포함

[주9] 광접속 시험기 Set : OTDR 1대, Power Source 1대, Power Meter 1대

[주10] 바닥형 구동 롤러, 광접속기 Set 및 광접속 시험기 Set는 팀간 호환사용 가능

3. 인력확보

항 목	구분	필 수 경 력	평가배점	상한점수
품질관리 전문인력	품질 관리	① 케이블 접속원 1급 자격 취득후 5년 이상 경력자 ② 케이블 공급유자격업체 해당업무(설계, 제작, 시공 등 관련업무) 12년 이상 경력자 ③ 한전 경력자중 다음에 해당되는 자 - 송변전분야 3직급 이상 5년 이상 경력자 - 지중송전업무 10년 이상 경력자	◦ 1인이상 확보 : 60점 ◦ 1인이 포설 및 접속 분야에 관계없이 3 팀까지 겸무 가능 ◦ 필수조건	300점
필수인력	현장 업무	① 포설팀장 - 지중송전 케이블 20C-km이상 포설 경력자 또는 케이블 접속원 1급 자격자 ② 포설팀원 - 지중송전 케이블 5C-km이상 포설 경력자 2명 또는 케이블 접속원 2급 자격자 2명	◦ 필수인력 확보 - 포설원 1명 : 20점 - 접속원 1명 : 50점 ◦ 기준인원 부족시 : 0 점(불합격) ◦ 포설팀은 타 현장과 중복되지 않는 한 3개 공사까지 참여 가능
		③ 접속팀장 - XLPE 케이블 접속원 10년 이상 경력자(1급) ④ 접속팀원 - XLPE 케이블 접속원 5년 이상 경력자(2급) - XLPE 케이블 접속원 2년 이상 경력자(3급) 주) 2, 3급은 1급 또는 2급으로 대체 가능
일반기능인력		⑤ 포설보조원 - 동일계(전기기기, 공사) 직업훈련 6개월 이상 수료 수준 이상자 - 대한전기협회의 지중송전 전기원 양성교육(8주) 과정 이수자	◦ 평가배점 : 30점 - 포설보조원 1명 : 10점
		⑥ 접속보조원 - 대한전기협회의 지중송전 전기원 양성교육(8주) 과정 이수자	◦ 해당 경력 보유자에 한해 접속보조원으로 2년 경과시 3급 자격 취득 기회 부여

4. 시공능력

시공능력 산정기준

구 분		포설 및 접속(C-km)
시공실적	설치(이설,대체, 재사용철거 포함)	20 C-km이상 350점

[실적 산정기준]

① 조립식접속함을 사용한 154kV XLPE 케이블 및 접속함(광복합 포함) 시공실적

② 재사용 철거 및 포설 시행시 중복 계산

③ 한전 및 발전자회사 이외의 민수실적 또는 해외실적은 불인정

④ 시공실적이 미달된 경우 : 1 C-km당 5점 감점

5. 품질보증 능력 평가기준

구 분	평 가 항 목		배 점		비 고
품질보증 계획서	종합계획서		5	5	등록 신청시 제출된 서류로 판정
	시공계획서	순서도 (Flow Chart)	2	25
		점검표 (Check List)	3
		공종별 안전대책	5
		공종별 시공계획	15
시공매뉴얼, 접속상세도면	공종별 시공매뉴얼, 장비사용법		10	20
	제작사별 케이블 접속 상세도면		10		실사시
합 계				50

별표#4

전문회사 실사 보고서

1. 회 사 명 :

2. 실사일자 :

3. 결과요약

구 분	팀별 취득점수	비 고
1. 업체요건
2. 장비확보
3. 인력확보
4. 시공능력		자격 연장시
5. 품질보증
합 계

실사결과 종합의견

5. 종합평가

적 격 ( ) 부적격 ( ) 조건부승인 ( )
실사반장	(인)	실사반원	(인)	일 자
※ 조건부 승인사유

별표#5

접 속(포설)원 경 력 확 인 서
① 인적사항	성 명			생년월일
	주 소		(전화번호 : )
② 근 무 처	회 사 명			대표자
	소 재 지		(전화번호 : )
	근무기간		～
③ 경력	연번	㉮참여기간	㉯참여사업명			비 고
			㉰발주자
		～
		～
		～
		～
		～
		～
위와 같이 154kV 이상 XLPE 케이블 접속(포설)원 근무경력을 확인합니다. 년 월 일 대표자 (인)
첨부서류 : 재직증명서 1부.

④ 경력	연번	㉮ 참여기간	㉯참여사업명	비 고
			㉰발주자
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～
		～