배전공사 협력회사 계약 특수조건

제1조(총칙)

본 계약은 “공사계약일반조건”이외에 배전 협력회사에 특별히 구분하여 적용되는 사항에 대하여 정함을 목적으로 한다.

제2조(단위공사)

“단위공사”라 함은 제5조 제1항의 규정에 의거 시공통보된 건별 공사를 말한다.

제3조(권리․의무)

계약상대자는 발주자가 발행한 시공통보서에 의거 단위공사를 수급, 시공하고 발주자는 그 결과에 따라 계약상대자에게 대가를 지불한다.

제4조(단위공사 계약금액)

단위공사 계약금액은 시공통보서상의 공사금액으로 하며 이는 공사부서에서 작성한 설계금액에 공량단가율을 곱한 금액으로 한다. (이하 “단위공사 계약 금액”이라 한다)

제5조(시공통보)

① 발주자는 단위공사 건별로 시공통보서를 발급하며, 시공통보서를 발급 받은 계약상대자는 시공통보서상의 공사기간내에 시공을 완료하여야 한다.

② 제1항의 시공통보서상의 준공기일은 지체상금 기산일로 한다.

제6조(공사의 착공)

계약상대자는 발주자의 단위공사별 시공통보서의 내용에 따라 착공하여야 한다.

제7조(사급자재 및 대여품)

① 사급자재 등은 특별한 이유가 없는한 발주자가 계약상대자와 협의하여 정한 일시와 장소에서 이를 인도하며 인도후의 운송비는 계약상대자가 부담한다.

② 계약에 의하여 발주자가 공급하는 사급자재는 포장단위로 출고할 수 있으며, 포장단위 출고에 따른 잉여분 및 환입자재중 사용가능품은 계약상대자가 보관․관리하고 차후 발주자가 공급할 사급자재 물량에서 상계 처리한다.

③ 계약상대자는 계약상대자가 보관하고 있는 사급자재를 계약기간 종료 1개월전 또는 발주자의 요청이 있을 경우 즉시 반환하여야 하며, 반환시킬 자재는 당초 출고된 자재와 동등 또는 그 이상품이어야 한다.

④ 계약상대자는 보관자재 관리에 있어 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 하며, 보관자재의 멸실 또는 훼손이 있을 때에는 이에 대하여 책임을 진다.

제8조(시공관리책임자)

계약상대자는 계약된 공사에 적격한 시공관리책임자(전기공사업법 등 관계법령에 의하여 적격한 전기공사기술자로 인정하는 자)를 지명하여 발주자에게 통지하여야 한다.

제9조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

설계변경으로 인한 계약금액 증감에 있어 증감된 공사량의 단가는 설계변경 당시의 단가에 공량단가율을 곱한 단가로 한다. 다만, 발주자가 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)의 증가된 물량에 대한 적용단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 공량단가율을 곱하여 산출한 단가의 범위안에서 발주자와 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의”라 한다)하여 결정한다. 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 공량단가율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

제10조(공종별 공사비단가 변동에 따른 계약금액의 조정)

변동전 공종별 공사비단가로 시공지시된 단위공사에 대해서는 최종대가 지급 시 변동된 공종별 공사비단가를 기준으로 계약금액을 조정할 수 있다.

제11조(전시조항)

계약상대자는 계약체결후 전쟁, 사변 또는 이에 준하는 비상사태가 발생한 경우에도 발주자의 별도 지시가 없는 한 공사를 계속하여야 한다.

제12조(산출내역서 제비율 산정)

계약상대자가 발주자에게 제출하는 산출내역서상의 제비율은 실적공사비 방식에 따라 작성하여야 한다. 다만, 발주자 사정에 의하여 일정금액 이하 단위공사에 원가계산방식을 적용할 경우 원가계산방식에 따라 작성한다.