목       차

1.   설  계  설  명  서

2.   일 반 과 업 지 시 서

3.   특 별 과 업 지 시 서

4.   예  정  공  정  표

5.   설  계  예  산  서

6.   위       치       도

1. 설계설명서

1) 과업의 목적

본 과업은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 및 그 시행령에 의거 국도상 교량(터널)에 대하여 시설물의 물리적․ 기능적 결함 및 성능저하, 상태 등을 신속·정확하게 조사·평가하고, 이에 대한 적절한 시설물의 안전성능 및 내구성능, 사용성능을 보완․ 보전케 함으로써 시설물의 안전을 확보하고자 본 설계도서에 의거 성능평가를 시행하고자 함.

2) 과업의 개요

- 제2종 성능평가 대상 시설물 (정밀안전점검 포함)

노선	시설물명	위 치			교량 제원						구 조 형 식		설계 하중	준공 년도	비고
		시.군	읍.면	동.리	교장 및연장	총폭	교고 (높이)	차로	경간	최대 경간장	상부	하부
계	13개소
17	경천교	완주	경천	경천	122.6	10.0	6.7	2	4	30.7	PSCI	TP	DB-24	1985	도로교
1	신궁육교	익산	왕궁	발산	115.0	19.3	7.0	2	3	45.0	STB	RAP	DB-24	2001	도로교
21	학동교(상)	김제	백구	석담	115.0	12.1	7.7	2	3	45.0	STB	RTA	DB-24	2002	도로교
21	학동교(하)	김제	백구	석담	115.0	12.1	7.7	2	4	45.0	STB	RTA	DB-24	2002	도로교
21	두현교(상)	완주	구이	두현	120.0	10.5	13.1	2	4	30.0	PSCI	RAP	DB-24	2005	도로교
21	두현교(하)	완주	구이	두현	120.0	10.5	13.1	2	4	30.0	PSCI	RAP	DB-24	2005	도로교
21	부용교(상)	김제	백구	부용	120.1	12.1	7.5	2	4	30.0	PSCI	RAP	DB-24	2002	도로교
21	부용교(하)	김제	백구	부용	120.1	12.1	7.5	2	4	30.0	PSCI	RAP	DB-24	2002	도로교
26	봉암육교	진안	부귀	봉암	120.4	11.0	5.5	2	4	30.0	PSCI	TP	DB-24	1998	도로교
27	익산교	익산	춘포	용연	120.9	19.3	8.5	2	4	30.2	PSCI	RAP	DB-24	2000	도로교
21	어두1교(상)	완주	상관	신	125.0	10.5	11.1	2	3	45.0	STB	RAP	DB-24	2005	도로교
21	어두1교(하)	완주	상관	신	125.0	10.5	11.1	2	3	45.0	STB	RAP	DB-24	2005	도로교
17	신리교	완주	상관	신	127.8	18.5	5.3	2	5	25.7	PSCI	RAP	DB-24	1986	도로교

2. 일반 과업 지시서

1) 과업의 범위

- 성능평가에서 실시되어야 할 사항은 아래와 같다.

가. 자료수집 및 분석

나. 현장조사 및 시험

다. 안전성능 평가

라. 내구성능 평가

마. 사용성능 평가

바. 종합 평가

사. 유지관리 전략 제안

아. 보고서 작성

2) 적용기준

시설물의 성능평가 및 조사결과 기입에 있어서 관련법령(규칙포함)또는 별도로 정한 규정에 의하는 것 이외에는 본 시방서를  따른다. 본 시방서에서 정하지 않은 사항은 다음에 열거하는 법령 및 지침서에 의거하여 시행하고 동 법령 및 지침서에 명시되지 않은 사항은 감독관의 지시를 받아 시행하여야 한다.

가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 시행령

나. 건설기준코드(구 콘크리트 구조기준)

다. 건설기준코드(구 콘크리트 표준시방서)

라. 건설기준코드(구 도로교 설계기준)

마. 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)

바. 국토교통부 발행 각종 관련 건설기준코드(구 표준시방서) 등

사. 기타 발주처의 지시시항

3) 각종 법령 및 규칙의 준수

점검기관 및 점검업무 종사자는 현재 대한국민 내에서 효력을 가진 모든 법률, 조례와 특히 다음 법률을 준수하여야 한다.

가. 예산회계법

나. 건설산업기본법

다. 근로기준법

라. 산업안전보건법

마. 건설안전보건법

바. 환경보존법

사. 도로법

아. 도로운송차량법

자. 하천법

차. 산림법

카. 공해방지법

타. 소득세법, 법입세법, 지방세법

파. 기타 상기법률과 관련된 령, 규칙, 규정 등

4) 점검원의 자격

시설물 성능평가을 실시할 수 있는 책임기술자의 자격은 다음과 같다.

-「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제9조에 해당하는 자격을 갖춘자

5) 성능평가 계획

가. 일반

성능평가 계획은 현장에서의 사전조사를 실시한 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

현장여건 및 문제점

시설관리자 및 주민의견 청취

제반시설 관련자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항들에 대한 사전 정보를 갖고 점검에 임하도록 한다.

나. 성능평가 계획 수립

사전조사 시 수집된 자료를 검토 후 점검계획을 수립하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

○ 조사범위 및 항목결정

- 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 성능평가 계획에 맞추어 결정

- 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우별도 조사항목 포함

○ 기존 점검자료 및 성능평가자료 검토

- 기 발견된 결함의 확인을 위해 검토

○ 분야별 소요인원 및 구성

- 분야별 총 소요인원을 판단하여 가용인력을 구성, 투입계획수립

○ 재료시험 실시에 대한 적정성여부 판단

○ 성능평가기간 및 계획된 작업시간 예측

○ 성능평가 범위 및 안전성에 대한 판단

○ 장비 선정

구조물의 성능평가에 필요한 재료시험 장비, 측량장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사 항목에 부합되는 장비를 준비하도록 한다. 또한, 접근장비는 육안조사 및 장비에 의한 측정이 가능하도록 사다리, 고소차, 교량점검차, 비계, 점검보트, 예인선 및 부선 등을 준비한다.

이러한 장비선정 시에는 다음의 항목을 고려한다.

- 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

- 장비위치에 따른 교통통제의 필요성

- 장비설치에 따른 지장물 존재여부

○ 접근방법 결정

- 교량 하면(바닥판 하면, 거더 하면, 박스거더 내부, 하부구조 두부, 교량받침 등)에 대한 현장조사 시에는 사다리, 고소차, 교량점검차, 비계 설치, 사다리 설치 등 현장여건에 따라 안전을 고려한 최선의 방법을 선택한다.

- 교량점검차의 접근이 불가능한 수중구간의 접근은 예인선 및 부선에 고소차를 태워 실시하되 안전장치의 착용 등을 통해 안전에 유의하며, 특히 기상상태에 주의한다.

○ 성능평가 종사자의 안전

- 성능평가 업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의한다.

○ 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

6) 점검실시 세부사항

가. 자료수집 및 분석

관리주체가 보존하는 감리보고서․시설물관리대장 및 설계도서 등 관련서류와 다음에 명시된 자료를 수집하고 검토․분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

(1) 설계도서

시설물의 준공도서로서 종․평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 수리․수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

(2) 시설물관리대장

(3) 시공관련 자료

(4) 안전점검 및 정밀안전진단 자료 및 성능평가 자료

(5) 보수․보강공사 자료

(6) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-45호) 제38조에 따라 성능평가 용역시 성능평가 착수일 기준으로 1년 이내의 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 자료를 활용할 수 있으며, 결과자료가 부족한 경우에는 과업을 추가하여 실시할 수 있다.

나. 현장조사 및 제반관련 시험 실시

1) 현장조사는 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

2) 현장조사는 「지침」 및 「시설물의 안전 및 유지관리의 실시에 관한 세부지침」에 의해 실시하며, 성능평가 대상 구조물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험을 실시하여 부재별로 성능평가에 활용한다.

3) 상세 외관조사 시 주요결함이 발견될 경우 이에 대한 구조안전성능 검토를 실시한다.

다. 세부시설별 조사사항

부재구분		진단부위		진단방법
상부구조	상판부	(1)교면포장(아스팔트, 콘크리트)		육 안
		(2)배수시설(배수구, 배수관)		육 안
		(3)방호울타리(강재, 콘크리트) 및 연석		육 안
		(4)바닥판 (철근콘크리트,강바닥판)	손상(균열, 탈락)	비파괴장비 및 육안
			열화(누수, 백태)	육 안
		(5)신축이음 (고무형, 강재형)	본체(강재, 고무재)	간단한 공기구, 육안
			후타재(콘크리트)	간단한 공기구, 육안
		(6)교량받침 (강재, 고무재)	기능, 손상, 열화	간단한 공기구, 육안
	거 더	(7)철근콘크리트	중앙부 손상, 결함, 열화	비파괴장비 및 육안
			받침부 손상, 결함, 열화	비파괴장비 및 육안
		(8)프리스트레스트	중앙부 손상, 결함, 열화	비파괴장비 및 육안
			받침부 손상, 결함, 열화	비파괴장비 및 육안
		(9)강재	손상(균열, 처짐, 변형)	계측장비, 육안
			연결부 상태	육 안
			열화(부식, 오염)	육 안
			브레이싱, 가로보	육 안
하부구조		(10)교대 및 (11)교각		비파괴장비 및 육안
		(12)기초		육안, 설계․시공자료

라. 선택과업

선택과업은 과업수행 전 계약상대자와 합동으로 실시한 사전조사 결과에 따라 조사항목을 선정하며, 과업수행 중에 발생되는 항목은 협의하여 추진한다.

마. 시설물의 안전성능 평가

(1) 상태안전성능 평가

상태안전성능 평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상태변화를 근거로 하여 상태안전성능 평가 기준에 따라 실시한다.

제2종성능평가에서는 대상시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태안전성능 평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 성능평가 보고서에 수록된 상태안전성능 평가 결과를 참조하여 책임기술자가 대상시설물에 대한 상태안전성능 평가 결과를 결정한다.

제1종성능평가에서는 대상시설물에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 대상시설물에 대한 상태안전성능 평가 결과를 결정한다.

상태안전성능 평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 외관조사 결과를 성능평가의 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

(2) 구조안전성능 평가

책임기술자는 재하시험(계측) 및 구조해석 또는 기존 의 구조안전성능 평가 자료와 함께 부재별 상태, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 시설물의 안전과 부재의 내하력 등을 종합적으로 평가하여 「세부지침」의 구조안전성능 평가 기준에 따라 시설물의 구조안전성능 평가 결과를 결정한다.

결과보고서에는 구조안전성능 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과, 입력자료에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

○ 비파괴재하시험

- 정적 또는 동적 재하시험

○ 지반조사 및 탐사

- 지표지질조사, 페이스맵핑, 시추 또는 오거보링, 시험굴, 공내시험, 시료채취, 토질 및 암반시험, G.P.R 탐사, 지하공동, 지층분석, 탄성파탐사, 전기탐사, 전자탐사, 시추공 토모그라피탐사, 물리검층 등

○ 지형, 지질조사 및 토질시험

○ 수리·수충격·수문 조사

○ 계측 및 분석

- 시설물 및 시설물 주변의 지반에 대한 침하, 변위, 거동 등의 계측(경사계, 로드셀, 지하수위계, 소음 및 진동 등) 및 계측 데이터 분석

○ 수중조사

- 조사선, 잠수부 등에 의한 교대·교각기초, 댐, 항만, 해저송유관 등의 수중조사

○ 누수탐사

○ 콘크리트 제체 시추조사

- 시추, 공내시험, 시편채취, 강도시험, 물성시험 등

○ 콘크리트 재료시험

- 코아 채취, 강도시험, 성분분석, 공기량시험, 염화물침투량시험 등

○ 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외)

○ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험

○ 기타 구조안전성능 평가를 위하여 필요한 사항

바. 내구성능 평가

시설물의 내구성능에 대한 평가는 시설물의 재료적 내구성능을 확인하기 시험결과와 외부환경에 대한 내구성능 저하인자 등을 종합적으로 검토하여 실시한다.

내구성능 평가를 위해 필요한 시험 항목 및 수량, 외부환경 인자 검토사항 등은 「세부지침」에 따르며, 시설물의 특성 및 평가 목적에 따라 이를 조정할 경우에는 결과보고서에 그 사유를 기재하여야 한다.

책임기술자는 내구성능을 확인하기 위한 시험결과, 부재의 열화 정도 등을 통하여 시설물의 사용환경과 시설물의 물리적 상태를 함께 검토하여 내구성능 등급을 지정하여야 한다.

사. 사용성능 평가

시설물의 사용성능에 대한 평가는 시설물의 설계 당시와 준공 이후 사용자·관리자의 사용상 편의성, 수요, 용량 등에 대한 현장조사, 설계도서 및 관리기준 등을 종합적으로 검토하여 평가를 실시하여야 하며, 이에 대한 세부사항은 「세부지침」에 따른다.

책임기술자는 현장조사, 설계도서 및 관리기준 등의 검토 결과와 시설물의 준공 이후 사용성능과 관련된 평가 지표의 변동 유무를 확인하여 평가에 반영하고 사용성능 등급을 지정하여야 한다.

사용성능 평가를 위하여 시설물 유형, 준공시기 및 사용환경이 유사한 시설물의 자료를 참고하여 반영할 수 있으며, 필요한 경우 자료를 획득할 수 있는 시험 및 측정 등을 추가로 실시할 수 있다.

아. 시설물의 종합평가 및 종합성능등급 지정

책임기술자는 성능평가를 통해 실시 결과에 따라 결정된 안전성능, 내구성능, 사용성능 등급을 종합하여 종합성능등급을 결정하여야 한다.

종합평가 및 종합성능등급의 산정 절차와 방법은 세부지침에 따르며, 최종적으로 안전성능, 내구성능, 사용성능 등급과 함께 종합성능등급의 결과를 작성하여 보고서에 수록한다.

이전 안전성능, 내구성능, 사용성능 및 종합성능등급을 변경하는 경우에는 성능평가 실시결과와 유지관리(보수·보강 등) 이력 등을 검토하여 변경된 사유를 성능평가 결과보고서에 기재하여야 한다.

(1). 안전성능 등급

등급	안전성능 수준
A (우수)	외관상 결함, 손상 또는 붕괴 등의 요인에 대한 문제점이 없는 성능 수준
B (양호)	일부 부재에서 경미한 결함이 발생하였으며, 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 성능 수준
C (보통)	광범위한 부재에서 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강이 필요한 성능 수준
D (미흡)	심각한 결함에 대한 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 성능 수준
E (불량)	심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축이 필요한 수준

(2). 내구성능 등급

등급	내구성능 수준
A (우수)	외부 환경조건 등으로 인한 내구성능 저하가 발생할 가능성이 낮은 성능 수준
B (양호)	일부 부재에서 내구성능의 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경 등의 조건을 고려하여 보수 여부를 결정해야 하는 성능 수준
C (보통)	광범위한 부재에서 내구성능의 저하 가능성이 조사되었거나 주의가 필요한 수준으로 진행되어 간단한 보수가 필요한 성능 수준
D (미흡)	광범위한 부재에서 내구성 저하가 진행되어 긴급한 보수 또는 교체가 요구되는 성능 수준
E (불량)	광범위한 부재에서 내구성능의 저하가 심각하게 진행되어 즉각 사용을 금지하고 보수 또는 교체가 필요한 성능수준

다. 사용성능 등급

등급	사용성능 수준
A (우수)	현재 수요 등을 만족하고 장래 수요 및 외부조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
B (양호)	현재 수요 등을 만족하나 장래 수요 및 외부조건 변화 등에 대한 관찰 및 주의가 필요한 성능 수준
C (보통)	장래 수요 및 외부조건 변화에 대해 기능발휘 또는 사용상 편의에 일부 문제점이 있어 일부 개선이 필요한 성능 수준
D (미흡)	대부분의 기능이 요구되는 기능에 미치지 못하거나 운영 및 사용상 편의가 심각하게 우려되는 수준으로서 광범위한 부분에서 개선이 필요한 성능 수준
E (불량)	기능 발휘 또는 사용상 편의를 기대할 수 없어 개선 또는 개량이 필요한 성능 수준

라. 종합성능등급

등급	종합성능 수준
A (우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
B (양호)	일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준
C (보통)	광범위한 부재에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 성능 수준
D (미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수․보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
E (불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

마. 안전성능·내구성능·사용성능 등급 및 종합성능등급 작성 방법

종합성능등급
안전 성능	내구 성능	사용 성능

(예시,

A
A	A	A

)

7) 유지관리 전략 제안

가. 일반

관리주체는 시설물의 상태 및 기능, 성능 등을 지속적으로 유지하고 공중의 안전 확보와 시설물의 기대수명이 연장될 수 있도록 발견된 결함에 대해 합리적이고 경제적인 보수·보강 등을 실시하여야 한다.

관리주체는 안전점검등 및 성능평가 실시결과에 따라 발생된 결함의 종류 및 정도, 시설물의 중요도, 사용환경 및 경제성 등을 면밀히 검토하여 필요한 보수·보강 방법 및 수준, 우선순위를 결정하여야 하며, 성능평가 대상시설물의 경우에는 성능목표를 고려하여 보수·보강 방법 및 수준, 우선순위를 결정한다.

나. 보수·보강 방법

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말하며, 보강이란 부재나 시설물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태안전성능 평가, 내구성능 평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태안전성능 평가 및 구조안전성능 평가, 내구성능 평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 시설물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수․보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

다. 보수·보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 「지침」 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

라. 보수·보강의 수준의 결정

보수․보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 다음 각 호의 경우 중에서 결정한다.

현상유지(진행억제)

실용상 지장이 없는 성능까지 회복

초기 수준 이상으로 개선

개축

마. 공법의 선정

시설물 결함에 따른 보수․보강은 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 각종 기준(표준시방서, 콘크리트 보수보강요령, 공동주택하자판정기준 등)을 참고해 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수․보강공법을 선정하도록 하며, 공법의 적용성, 안전성능, 내구성능, 사용성능, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 면밀한 검토이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서 시설물관련 제반자료, 성능평가 시 수행한 각종 안전성능 평가 및 내구성능 평가, 사용성능 평가 결과를 기초로 하여, 결함부위 또는 부재에 적합한 보수·보강공법을 선정하여야 한다.

콘크리트의 대표적인 손상인 균열에 대한 보수·보강방법은 다음과 같으며, 시설물별 주요 보수·보강공법은 시설물편을 참조하여 보수·보강공법을 선택할 수 있다.

균열기준은 구조물의 중요도, 특성 등에 따라 다양하므로 구조물의 특성 및 균열현상 등을 고려하여 적절한 보수공법을 사용하여야 한다.

표면처리공법

주입공법

충전공법

침투성방수제 도포공법 등

바. 보수·보강 우선순위의 결정

시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수․보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

보수보다는 보강을, 보조부재보다는 주부재를 우선하여 실시

시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 실시

보수·보강의 수준과 우선순위는 시설물의 안전성능 저하가 우려되어 보수·보강이 시급하거나 투자대비 효과가 큰 시설물을 중심으로 시설물의 성능목표를 합리적이고 경제적으로 달성될 수 있도록 제시되어야 하며 세부적인 방법 및 절차는 「세부지침」에 따른다.

사. 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책, 성능목표, 투자우선순위 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 성능평가 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

아. 유지관리 전략 제안

책임기술자는 성능평가를 통해 발견된 손상 및 결함에 대해 시설물의 성능목표를 달성하고 최적 성능과 기능을 유지할 수 있는 보수·보강 방법을 검토·분석하여 합리적인 유지관리 전략을 제시하여야 한다.

보수·보강 방법은 조사된 결함 및 손상에 대해 성능평가 실시결과와 성능목표간의 정도를 분석·검토하여 보수·보강 물량 산정과 적정한 공법을 선정하여야 한다.

보수·보강의 필요성은 성능평가 실시결과에 따른 결함의 정도에 대해 각종 기준(건설기준코드(구 설계기준 및 표준시방서) 등)을 참조 및 검토하여 판단하고, 그 결과에 대해 경제적이고 가장 적합한 공법을 선정하여야 한다.

보수·보강의 수준과 우선순위 결정은 시설물의 성능목표와 효용가치, 중요도, 사용환경 등과 시설물의 안전성능 저하가 우려되어 보수·보강이 시급하거나 투자대비 효과가 큰 시설물을 중심으로 다음의 사항을 고려하여 우선순위를 수립하여야 한다. 이에 대한 세부적인 방법 및 절차는 「시설물편」에 따른다.

현재의 편익을 미래의 편익보다 우선하여 실시

미래의 비용을 현재의 비용보다 우선하여 실시

시설물의 안전성을 비용·편익보다 우선하여 실시

「법」 제22조에 따른 시설물의 중대한 결함에 대해서는 1∼3호보다 우선하여 실시

책임기술자는 시설물의 성능목표를 달성 및 유지하고 중기관리계획에 반영될 수 있도록 경제적이고 합리적인 보수·보강 방법 및 우선순위 등을 검토하여 종합적인 유지관리 전략을 수립하여 결과보고서에 포함하여야 한다.

필요한 경우 성능평가 실시결과를 토대로 안전하고 경제적으로 시설물을 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시할 수 있으며, 다음의 내용을 포함하여 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

대상시설물의 점검요령

결함 및 손상의 종류와 원인

결함 종류에 대한 조치대책

해당 시설물의 그림 및 사진 등

자. “시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-45호)“ [별표 18] 성능평가 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항 에 따라 작성, 제출하여야 한다.

□ 성능평가 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항(국토교통부 고시  제2018-45호, 별표 18)

구 분		내 용
1. 성능평가 결과보고서
	가. 서두	보고서의 표지 다음에 성능평가의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다. ∘제출문(성능평가을 실시한 기관의 장) ∘시설물의 목표성능 및 성능평가 결과표(기본성능 및 종합등급) ∘참여 기술진 명단 ∘시설물의 위치도 ∘시설물의 전경사진, 부위별 사진 ∘성능평가 결과 요약문 ∘보고서 목차
	나. 성능평가의 개요	성능평가의 범위와 과업내용 등 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다. ∘성능평가의 목적 ∘시설물의 개요 및 이력사항 ∘평가의 범위 및 과업내용 ∘사용장비 및 시험기기 현황 ∘성능평가 수행일정
	다. 자료수집 및 분석	성능평가의 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다. ∘설계도면, 구조계산서 ∘기존 정밀점검·정밀안전진단·성능평가 실시결과 ∘안전성능, 내구성능 및 사용성능 평가를 위한 자료수집 현황 ∘보수․보강이력 및 용도변경 ∘시설물의 내진설계 여부 확인 ∘기타 관련자료

구 분			내 용
1. 성능평가 결과보고서
	라. 현장조사 및 시험		과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다. ∘시설물의 외관조사 결과분석 ∘주요한 결함(손상)의 발생원인 분석 ∘재료시험, 측정결과의 분석
	마. 시설물의 안전성능평가		과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라 시설물의 상태안전성과 구조안전성 결과를 작성한다
		상태 안전성능	∘시설물의 외관조사 결과 ∘부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태안전성능 평가 결과 결정
		구조 안전성능	∘구조안전성능 평가를 위한 시험 및 계측 결과 분석(현장재하시험 및 계측, 지형·지질·지반·토질조사, 시설물의 변위·거동 등의 측정결과 분석 등) ∘구조계산 및 해석을 통한 결과 및 분석(관리주체의 요구에 의해 수행한 수리·수문 등 해석결과 및 분석 포함) ∘시설물의 내(하)력 평가 등(관리주체의 요구에 의해 수행한 내진성능평가 포함) ∘시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성능 평가 포함 ∘시설물의 구조안전성 평가 결과 결정
	바. 시설물의 내구성능 평가		∘내구성능 평가를 위한 관련자료 분석 및 결과 ∘콘크리트 또는 강재 등의 내구성능 분석 및 결과 ∘시설물의 내구성능 평가 결과 결정
	사. 시설물의 사용성평가		∘사용성능 평가를 위한 관련자료 분석 및 결과 ∘사용성능 평가를 위한 현장 및 실내시험 결과 분석 ∘시설물의 사용성능 평가 결과 결정

구 분		내 용
1. 성능평가 결과보고서
	사. 종합평가	∘시설물의 안전성능, 내구성능, 사용성능 결과 분석 ∘안전성능, 내구성능, 사용성능을 종합하여 종합등급 결과의 결정 ∘시설물의 종합등급 지정
	아. 시설물의 유지관리 전략 제안	시설물의 성능평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재 등에 대하여 적용할 보수․보강 방법과 우선순위 등의 유지관리 전략을 제시함. ∘시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ∘보수・보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등 ∘당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등 ∘성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시
	자. 종합결론 및 건의사항	∘성능평가 실시결과의 종합결론 ∘유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항 ∘기타 필요한 사항
	차. 부록	∘과업지시서 ∘외관조사망도 ∘구조해석 모델링 및 수치해석 자료 (입출력자료는 e-보고서에 포함) ∘측정, 시험, 계측 성과표 ∘안전성능(상태 및 구조안전성능) 평가 결과 자료 ∘내구성능 평가 결과 자료 ∘사용성능 평가 결과 자료 ∘시설물관리대장 사본 ∘현황조사 및 외관조사 사진첩 ∘사용장비 및 기기의 사진 ∘사전조사 자료 일체 ∘기타 참고자료(성능평가 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검등 결과보고서 등 관련자료 포함)

3. 특별과업지시서

1) 과업기간

본 과업기간은 착수일로부터 8개월(240일간)으로  하고, 다음의 경우 관의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때

나. 관의 지시에 따라 과업수행이 중단되었을 때

다. 관의 계획 변경으로 과업내용의 변경 및 증․감이 있을 때

2) 설계 변경 조건

가. 수량의 변동이 생겼을 때

나. 천재지변으로 본 설계도서대로의 설계용역 수행이 불가능할 때

다. 본 과업수행 상 변경사항이 발생하였을 때

라. 우리 사무소의 방침 변경 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사, 설계비 및 용역비 변경

3) 과업수행지침

가. 착수계 및 대리인계 제출

계약 후 7일 이내로 착수계, 대리인계, 용역과업을 수행할 인원에 대한 경력서 및 세부 수행계획을 항목별로 작성하여 제출 승인 받아야 하며, 동 계획서에는 아래와 같은 내용이 첨부되어야 한다.

① 과업수행 계획서

② 인력 및 장비 투입계획서

③ 과업수행에 대한 세부 공정계획서

④ 안전관리계획서

⑤ 사전검토 보고서

나. 본 과업에 명시되어 있지 않은 사항은 감독관과 사전 협의하여 결정하여야 한다.

다. 과업수행에 따른 관계자료 및 산출근거 등을 부록에 수록하여야 한다.

라. 보고서 작성에 있어서 수록내용 및 편집순위에 대하여는 감독관과 사전 협의하여야 하며 본 과업의 최종 보고서를 인쇄하기 전 감독관의 승인을 득한 후 인쇄하는 것을 원칙으로 하여 과업의 최종 결론 도출과정을 보고한다.

마. 본 용역이 완료 후라도 성과품의 보완지시가 있을 때에는 과업 수행자의 부담으로 보완하여야 한다.

바. 보고서는 국문을 사용하고 기술용어는 국토해양부에서 제정한 용어를 사용하여야 하며, 내용은 현장에서 실시한 제반조사사항 및 계산 분석에 대한 결과를 상세히 검토 수록하여야 하며 보수부위 등 제반규제 조치사항을 제시하여야 한다.

사. 본 과업의 효율적인 완수를 위하여 과업진도 및 추진계획 보고서를 매 15일마다 제출하고 감독관의 요구가 있을 때 수시로 과업전반에 대한 진행 보고를 하여야 한다.

아. 과업수행자가 작성 제출한 용역과업 수행계획서 내용을 변경하여 수행하고자 할 때에는 감독관의 사전 승인을 받아야 한다.

자. 과업수행자는 과업수행 시 세부추진일정 현지조사 계획 등에 대하여 감독관과 사전 긴밀히 협조 수행하여야 한다.

차. 사진첩에는 교량의 측면도를 첨부하고 부분적인 사진의 번호를 부과하여 측면에 표시하고 설명을 기재하여야 한다.

카. 과업수행 중 기존교량에 손상을 가한 부위는 조사가 끝난 후 원상 복구하여야 한다.

타. 현장조사 결과는 즉시 당소에 1부 제출하여 조사내용을 상호 검토하고 내용을 협의하여야 한다.

파. 보고서 작성 시에는 3페이지 이내의 요약서를 첨부해야 한다.

하. 현장 조사 시는 사고예방을 위하여 교통안전관리를 철저히 하고 작업개시 전에 시설물 전후에 안내표지판, 위험 표지판을 일정 간격으로 설치하고 신호수를 배치하여 가급적 차량소통에 큰 지장이 없도록 하여야 하며, 만약 교통사고가 발생할 시에는 과업수행자가 전적으로 책임을 진다.

4) 점검보고서

성능평가 보고서에 포함할 사항들은 다음과 같다.

가. 서두

보고서의 표지 다음에 성능평가의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙임

① 제출문(성능평가를 실시한 기관의 장)

② 시설물의 성능목표 및 성능평가 결과표(기본성능 및 종합성능등급)

③ 참여 기술자 명단

③ 시설물의 위치도

④ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

⑤ 안전점검결과 요약문

⑥ 보고서 목차

나. 성능평가의 개요

성능평가의 범위와 과업내용 등 점검계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술함.

① 점검의 목적

② 시설물의 개요 및 이력사항

③ 점검의 범위 및 과업내용

④ 사용장비 및 비파괴 시험기기

⑤ 점검수행 일정

다. 자료수집 및 분석

성능평가의 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.

· 설계도면, 구조계산서

· 기존 정밀점검·정밀안전진단·성능평가 실시결과

· 안전성능, 내구성능 및 사용성능 평가를 위한 자료수집 현황

· 보수․보강이력 및 용도변경

· 시설물의 내진설계 여부 확인

· 기타 관련자료

라. 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

· 시설물의 외관조사 결과분석

· 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

· 재료시험, 측정결과의 분석

마. 시설물의 안전성능 평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라 시설물의 상태안전성능과 구조안전성능 결과를 작성한다

(1) 상태안전성능 평가

· 시설물의 외관조사 결과

· 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태안전성능 평가 결과 결정

(2) 구조안전성능 평가

구조안전성능 평가를 위한 시험 및 계측 결과 분석(현장재하시험 및 계측, 지형·지질·지반·토질조사, 시설물의 변위·거동 등의   측정결과 분석 등)

· 구조계산 및 해석을 통한 결과 및 분석(관리주체의 요구에 의해 수행한 수리·수문 등 해석결과 및 분석 포함)

· 시설물의 내(하)력 평가 등(관리주체의 요구에 의해 수행한 내진성능평가 포함)

· 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게    작용하는 경우에 대한 구조안전성능 평가 포함

· 시설물의 구조안전성능 평가 결과 결정

바. 시설물의 내구성능 평가

· 내구성능 평가를 위한 관련자료 분석 및 결과

· 콘크리트 또는 강재 등의 내구성능 분석 및 결과

· 시설물의 내구성능 평가 결과 결정

사. 시설물의 사용성능 평가

· 사용성능 평가를 위한 관련자료 분석 및 결과

· 사용성능 평가를 위한 현장 및 실내시험 결과 분석

· 시설물의 사용성능 평가 결과 결정

아. 종합평가

· 시설물의 안전성능, 내구성능, 사용성능 결과 분석

· 안전성능, 내구성능, 사용성능을 종합하여 종합성능등급 결과의 결정

· 시설물의 종합성능등급 지정

자. 시설물의 유지관리 전략 제안

시설물의 성능평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재 등에 대하여 적용할 보수․보강 방법과 우선순위 등의 유지관리 전략을 제시한다.

· 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석

· 보수・보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

· 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

· 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시

차. 종합결론 및 건의사항

· 성능평가 실시결과의 종합결론

· 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

· 기타 필요한 사항

카. 부록

· 과업지시서

· 외관조사망도

· 구조해석 모델링 및 수치해석 자료 (입출력자료는 e-보고서에 포함)

· 측정, 시험, 계측 성과표

· 안전성능(상태 및 구조안전성능) 평가 결과 자료

· 내구성능 평가 결과 자료

· 사용성능 평가 결과 자료

· 시설물관리대장 사본

· 현황조사 및 외관조사 사진첩

· 사용 장비 및 기기의 사진

· 사전조사 자료 일체

· 기타 참고자료(성능평가 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검등 결과보고서 등 관련자료 포함)

5). 안전관리

가. 일반

제1종성능평가 및 제2종성능평가를 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 측정 장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.

나. 제1종성능평가 및 제2종성능평가 종사자의 안전

(1) 제1종성능평가 및 2종 성능평가를 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호 장구를 항시 착용하여야 하며 측정 장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

(2) 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

다. 공공의 안전

공공의 안전측면에서 관리주체는 시설물의 1종 성능평가 및 2종 성능평가 실시 기간 동안 교통통제와 작업 공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.

6) 지시사항

가. 국도29호선 화순 대리교에 대하여는 하자보수공사가 진행 중에 있으므로, 용역 착수 시 조속히 구조계산 및 구조물 안전성 검토 등 발주처 지시사항을 이행하여 용역을 추진하여야 함

7). 성과품 납품목록

이 과업과 관련한 성과품은 다음과 같으며 이에 대한 지불은 산출내역서상의 계약금액으로 한다.

성능평가보고서(부록포함) : 5부

CD보고서 : 5부

사진첩 : 3부

8) 보안대책

가. 과업전반에 걸쳐 보안에 이상이 없도록 하여야 하며, 과업수행으로 취득한 사실에 대해서는 철저한 보안유지를 하여야 한다.

나. 본 과업과 관련 있는 자료 및 정보에 대해서는 감독관청의 사전 승인 없이 업무기관 및 타인에게 제공 또는 대여 할 수 있다.

9) 관 장비 지원

교량의 외관 상세조사나 재하시험에 필요한 아래의 관용 차량은 1주일 전에 우리 소와 사전협의 및 지시에 따라야 하며, 관용 장비의 지원에 드는 각종비용은 우리 소에서 부담한다.

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
교량점검차량	34톤	대	1

1. 설   계   설   명   서

2. 일 반 과 업 지 시 서

3. 특 별 과 업 지 시 서

4. 예   정   공   정   표

5. 설   계   예   산   서

6. 위     치     도